國際土木建築工程承包合同

前言 
鑒於…… 
雙方達成協定如下：

第一章	   定義與解釋

第一條 定義 
本合同（按下文所定義的）中的下列詞和用語，除文中另有要求者外，應具 有本條所賦予的含義： 
1.1 雇主是指本合同所指明的當事人以及取得此當事人資格的合法繼承人，但 除非承包商同意，不包括此當事人的任何受讓人，本合同中的雇主爲……（填入 名稱）。 
1.2 承包商是指其投標書已爲雇主接受的當事人以及取得此當事人資格的合 法繼承人，但除非雇主同意，不指此當事人的任何受讓人。本合同中的承包商 爲……（填入名稱）。 
1.3 分包商是指本合同中指定作爲分包工程某一部分的分包商的任何當事人， 或由工程師同意已將工程的某一部分分包給他的任何當事人以及取得該當事人資 格的合法繼承人，但不指此當事人的任何受讓人。 
1.4 工程師是指雇主爲本合同目的而指定作爲工程師，或由雇主隨時指派並 書面通知承包人要爲本合同目的替代上述指定的工程師以工程師身份行事的工程 師。本合同中的工程師是指…（填入名稱）。 
1.5 工程師代表是指由工程師根據本合同隨時指定的人員。 
1.6 合同是指合同條款及其附件，包括說明書、圖紙、規範、工程量表、投 標書、中標函、合同協議書，以及其他明確列入中標函或合同協議書（如已完成）中的此類進一步的文件。 
1.7 規範是指合同中包括的工程規範，以及根據第95條規定的或由承包商提 出並經工程師批准的對規範的任何修改或增補。 
1.8 圖紙是指工程師根據合同規定向承包商提供的所有圖紙、計算書和類似 性質的技術資料，以及由承包商提供並經工程師批准的所有圖紙、計算書、樣品、 圖樣、模型、操作和維修手冊以及類似性質的其他技術資料。 
1.9 工程量表是指構成投標書一部分的已標價的以及完成的工程量表。 
1.10 投標書是指承包商根據合同的各項規定，爲工程的實施、完成和任何缺 陷的修補，向雇主提出並爲中標函接受的報價書。 
1.11 中標函是指雇主對投標書的正式書面接受。 
1.12 合同協議書是指本合同第26條所述的合同協議書。 
1.13 投標書附件是指附于本合同之後並包括在投標書格式內的附件。 
1.14開工日期是指承包商接到工程師根據本合同發出開工通知書的日期。 
1.15 竣工時間是指合同規定從工程開工日期算起到工程或其任何部分或區段 施工結束並且通過竣工檢驗的時間。 
1.16 竣工檢驗指合同規定的或由工程師與承包商另行商定的檢驗，這些檢驗 是由承包商在雇主對工程或其任何部分區段接收之前進行的。 
1.17 移交證書是指依據第93條頒發的證書。 
1.18 合同價格是指中標函中寫明的按照合同規定，爲了工程的實施、完成及 其任何缺陷的修補應付給承包商的金額。 
1.19 保留金是指雇主根據第92．2（a）規定留存的所有金額的總和。 
1.20工程是指永久工程和臨時工程或視情況爲二者之一。 
1.21 永久工程是指根據合同將實施建造的永久工程包括工程設備。 
1.22 臨時工程是指在工程實施、完成和修補其任何缺陷時需要或有關的所有 各種臨時工程，但承包人的設備除外。 
1.23 工程設備是指預定構成或構成永久工程一部分的機械、儀器以及類似設 備。 
1.24 承包商的設備是指在工程實施、完成及其缺陷修補過程中所需要的全部 裝置和任何性質的物品，但不包括預定構成或構成永久工程一部分的設備、材料 或其他物品。 
1.25 區段是指在合同中具體指定作爲一個區段的工程的一部分。 
1.26 現場是指由雇主提供的用於進行工程施工的場所以及在合同中可能明確指定爲現場組成部分的任何其他場所。 
1.27 費用是指在現場之內或之外已正當發生或將要發生的全部費用，包括管 理費和應合理分攤的其他費用，但不包括任何利潤補貼。 
1.28 日是指曆法日。 
1.29 外幣是指工程所在國之外的任一國家的貨幣。 
1.30 書面函件是指任何手寫、打字或印刷的通訊，包括電傳、電報、傳真和 電子郵件。 
第二條 解釋 
2.1 凡指當事人或當事人各方的詞應包括公司和企業以及任何具有法定資格 的組織。 
第三條 單數和複數 
3.1 僅表明單數形式的詞也包括複數含義，視合同上下文需要而定，反之亦 然。 
第四條 通知、同意、批准、證明和決定 
4.1 在合同條款中，無論何處述及由任何人發出或頒發任何通知、同意、批 准、證明或決定，除另有說明者外，均指書面的通知、同意、批准、證明或決定， 而通知、證明或決定字樣均應據此解釋。對於任何此類同意、批准、證明或決定 都不應被無故扣壓或拖延。 

第二章 合同的內容和範圍

第五條 一般規定 
5.1 在合同的內容和範圍詳細規定在本合同的附件當中，包括本工程的施工、 建成和維護，除本合同另有規定者外，還包括提供經本合同指定或從本合同中合 理地推知需要提供的爲本工程的施工、建成和維護所需的一切勞力、材料、施工 設備、臨時性工程和不論臨時性或永久性的各物。 
第六條 承包商的工作範圍 
……
第七條 雇主的工作範圍 

…… 

第三章 工程師及工程師代表

第八條 工程師的職責和權力 
8.1 工程師應履行合同規定的職責。 
8.2 工程師可能使合同中規定的或者合同中必然隱含的權利，但是，如果根 據雇主任命工程師的條件，要求工程師在行使上述權力之前，應得到雇主的具體 批准，則此類要求的細節在本合同予以表明。否則，即應視爲工程師在行使此類 權力時均已事先經雇主批准。 
除在合同中明確規定外，工程師無權解釋合同規定的承包商的任何義務。 
第九條 工程師代表 
9.1 工程師代表應由工程師任命並對工程師負責，應該履行和行使由工程師 根據第9.2、9.3款可能授予他的職責和權力。 
9.2 工程師可以將賦予他自己的職責和權力委託給工程師代表並可隨時撤回 此類委託。任何此類委託或撤回均應採取書面形式，並且在其副本送達雇主或承 包商之後，始得發生效力。 
9.3 由工程師代表按工程師的委託向承包商發出的任何信函均與工程師發出 的信函具有同等效力。但： 
（a）因爲工程師代表的失誤，未曾對任何工作、材料或工程設備發出否定意 見，不應影響工程師對該工作、材料或工程設備提出否定意見，並發出進行改正 的指示的權力； 
（b）若承包商對工程師代表的任何函件有任何質疑，他可將該問題提交給工 程師，工程師應對此信函的內容進行確認，否定或更改。 
9.4 工程師或工程師代表可任命任意數量的人員協助工程師代表履行合同規 定的職責，工程師或工程師代表應將此類人員姓名、職責和權力範圍通知承包商。 上述助理無權對承包商發任何指示，除非此類指示又對他們行使助理的職責和確 保他們根據合同規定對材料、工程設備或工藝質量進行驗收是必不可少的, 任何助理爲此目的發出的任何指示均應視爲工程師代表發出的指示。
第十條 書面指示 
10.1 工程師應以書面形式發出指示，若工程師認爲由於某種原因有必要以口 頭形式發出任何此類指示，承包商應遵守該指示。工程師可在該指示執行之前或 之後，用書面形式對其口頭指示加以確認，在這種情況下應認爲此類指示是符合 本款規定的。若承包商在七天內以書面形式加以否認，則此項指示應視爲是工程 師的指示。 
本條規定應同樣適用于工程師代表和任何根據合同任命的工程師的或工程師 代表的助理發出的指示。 
第十一條 工程師應行爲公正 
11.1 凡按照合同規定要求工程師自行： 
（a） 表明他的決定、意見或同意，或 
（b） 表示他的滿意或批准，或 
（c） 確定價值，或 
（d） 採取可能影響雇主或承包商的權利和義務的行動時，他應在合同條款 規定內，並兼顧所有條件的情況下，做出公正的處理。任何此類決定、意見、贊 同，表示滿意或批准、確定的價值或採取的行動，均可按合同規定予以公開、複 查或修正。 

第四章 轉讓與分包

第十二條 合同轉讓 
12.1 沒有雇主的事先同意,承包商不得將合同或合同的任何部分，或合同中 或合同名下的任何利益或好處進行轉讓，但下列情況除外： 
（a） 按合同規定應支付或將支付的以承包商的銀行爲受款人的費用，或者 
（b） 把承包商從任何責任方那裏獲得免除其責任的權力轉讓給承包商的保 險人。 
第十三條 分包 
13.1 承包商不得將整個工程分包出去。除合同另有規定外，沒有工程師的事 先同意，承包商不得將工程的任何部分分包出去。任何此類同意均不應解除合同規定的承包商的任何責任或義務，承包商應將任何分包商、分包商的代理人、雇 員或工人的行爲、違約或疏忽、完全視爲承包商自己及其代理人、雇員或工人的 行爲、違約或疏忽一樣，並爲之負完全責任。 
但對下列情況承包商無需取得同意： 
（a） 提供勞力，或 
（b） 根據合同的規定採購材料，或 
（c） 合同中已被指定的分包商對工程的任何一部分進行分包。 
第十四條 分包商義務的轉讓 
14.1 當分包商在所進行的工作，或其提供的貨物、材料、工程設備或服務等 方面，爲承包商承擔了合同規定的缺陷責任期限結束後的任何延長期間須繼續承 擔的任何連續義務時，承包商在根據雇主的要求和由雇主承擔費用的情況下，在 缺陷責任期滿之後的任何時間，將上述未終止的此類義務的權益轉讓給雇主。 

第五章 合同文件

第十五條 語言和法律 
15.1 擬定合同文件的語言爲（填入語言名稱），其主導語言爲_____（如果 有二種以上語言時） 
15．2 適用于本合同並據以對合同進行解釋的法律爲在_________________ 
國家生效的法律。 
第十六條 合同文件的優先次序 
    16.1 構成合同的文件被認爲是互爲說明的，但在發生分歧時，則應由工程師 對此作出解釋或校正，工程師並應就此向承包商發佈有關指示，在此情況下，除 合同另有規定外，構成合同的文件的優先次序爲： 
（1）合同協議書； 
（2）中標函； 
（3）投標書； 
（4）本合同； 
（5）規範的圖紙； 
（6）構成合同的其他文件。
第十七條 圖紙和文件的保管與提供 
17.1 圖紙應由工程師單獨保管，但應免費提供給承包商兩套複製件。承包商 需要更多複製件時，其費用自行負擔。除非爲執行合同絕對需要，承包商在未經 工程師同意的情況下，不得將雇主或工程師提供的圖紙、規範和其他文件用於第 三方或轉讓給第三方。在發出缺陷責任證書時，承包商應將根據合同提供的全部 圖紙、規範和其他文件退還給工程師。 
17.2 承包商應將其按合同規定提供的並經工程師批准的全部圖紙、規範的其 他文件的四套複印件提交給工程師，同時對於不能複製成相同規格的任何資料亦 應提交一套可複製的副本。此外，承包商應按工程師的書面要求提交更多的上述 圖紙、規範的其他文件的複印件供雇主使用，其費用由雇主支付。 
17.3 上述提供給承包商的或由承包商提供的圖紙的一套複印件應由承包商保 留在現場，該套圖紙應可隨時提供給工程師和任何由工程師書面授權的其他人員 檢查和使用。 
第十八條 進展中斷 
18.1 如果工程師未在合理時間內發出進一步的圖紙和指示並有可能造成工程 計劃和施工的延誤或中斷時，承包商應向工程師提交通知書，並同時向雇主呈交 副本。該通知書應包括所需的圖紙或指示，需要的原因和時間，以及，如果延誤 會使工程誤期或中斷等詳細說明。 
第十九條 圖紙誤期和誤期的費用 
19.1 在任何情況下，如因工程師未曾或不能在一合理時間內發出承包商按 18．1條發出的通知。 
書中已說明了任何圖紙或指示，而使承包商蒙受誤期和／或招致費用的增加 時，則工程師在與雇主和承包商作出必要的協商後，應作出如下決定： 
（a） 根據合同規定，給予承包商延長工期的權利，以及 
（b） 需增加到合同價格上去的此類費用的數額，應相應地通知承包商，並 將一份副本呈交雇主。 
第二十條 承包商未能提交圖紙 
20.1 如果工程師未曾或不能發出任何圖紙或指示的全部或部分原因是由於承 包商未能按合同的要求提交圖紙、規範或其他文件，則工程師在根據第19.1條規 定作出決定時，應將承包商的這一失誤考慮在內。 
第二十一條 補充圖紙和指示 
21.1 爲使工程合理而正確地施工和竣工，以及爲修復其中的任何缺陷，工程 師應有權不斷向承包商發出此類補充圖紙和指示。 
第二十二條 由承包商設計的永久工程 
22.1 凡合同中明文規定應由承包設計部分永久工程時，承包商應將下列文件 提交工程師批准： 
（a）爲使工程師對該項設計的適用性和完備性感到滿意所必須的圖紙、規範、 計算結果及其它資料，以及 
（b）使用和維修手冊連同竣工後永久工程圖紙，這些資料須足夠地詳細，以 使雇主能夠對採用該設計的永久工程進行使用、維護、拆卸、重新裝配和調整。在 此類使用和維修手冊連同竣工圖紙未提交並獲得工程師批准之前，不能認爲該工 程已經竣工並可按合同規定進行接收。 
第二十三條 責任不受批准影響 
23.1 工程師根據合同規定進行的批准，不應解除合同中規定的承包商的任何 責任。 

第六章 一般義務

第二十四條 承包商的一般責任 
24.1 承包商應按照合同的各項規定，以應有的精心和努力，在合同規定的範 圍內對工程進行設計、施工和竣工，並修補其任何缺陷。承包商應爲該工程的設 計、施工和竣工以及爲修復其任何缺陷而提供所需的不管是臨時的還是永久的全 部的工程監督、勞務、材料、工程設備、承包商所用設備以及其他物品，只要提 供上述物品的必要性在合同內已有規定或可以從合同中合理地推論得出。 
第二十五條現場作業和施工方法 
25.1承包商應對所有現場作業和施工方法的完備、穩定和安全負全部責任。 承包商對不是由他編制的永久工程的設計或規範或者任何臨時工程的設計或規範 不應承擔責任。凡是合同中明確規定由承包商設計的部分永久工程，儘管有工程 師的任何批准，承包商應對該部分工程負全部責任。 
第二十六條 合同協定 
26.1 在被邀請簽約時，承包商應同意簽訂並履行合同協議書，該協議書的擬 定和簽訂費用由雇主承擔。 
第二十七條 履約保證 
27.1 承包商應在收到中標函之後二十八天內，按投標書附件中注明的金額取 得擔保，並將此保函提交給雇主。當向雇主提交此保函時，承包商應將這一情況 通知工程師。提供的擔保機構須經雇主同意。除非合同另有規定外，執行本款時 所發生的費用由承包商負擔。 
第二十八條 履約保證的有效期 
28.1 在承包商根據合同完成施工和竣工，並修補了任何缺陷之前，履約保證 將一直有效。但在根據本合同發出缺陷責任證書之後，即不應對該擔保提出索賠， 並應在上述缺陷責任證書發出後十四天內將該保函退還給承包商。 
第二十九條 根據履約保證的索賠 
29.1 在任何情況下，雇主在按照履約擔保提出索賠之前，皆應通知承包商， 說明導致索賠的違約性質。 
第三十條 現場視察 
30.1 在承包商提交投標書之前，雇主應向承包商提供向雇主或雇主代表根據 有關該項工程的勘察所取得的水文地質資料，但是承包商應對他自己對上述資料 的解釋負責。 
30.2 應當認爲承包商在提交投標書之前，已對現場和其周圍環境及與之有關 的可用資料進行了視察和檢查，並對以下幾點在費用和時間方面的可行性感到滿 意：
（a）現場的形狀和性質，包括地質條件； 
（b）水文的和氣候的條件； 
（c）爲工程施工和竣工以及修補其任何缺陷所需的工作和材料的範圍和性 質； 
（d）進入現場的手段以及承包商可能需要的食宿條件。 
應當認爲承包商的投標書是以雇主提供的可利用的資料和承包商視察和檢查 爲依據的。 34.1 承包商應當在中標函簽發日之後，以工程師規定的適當格式和詳細程度， 向工程師遞交一份工程進度計劃，以取得工程師的同意。無論工程師何時需要，承 包商還應以書面形式提交一份對其進行工程施工所擬採用的安排和方法的總說明， 以供參考。 
34.2 無論何時，如果工程師認爲，工程的實際進度不符合第34.1款中已經 同意的進度計劃時，承包商應根據工程師的要求提出一份修訂過的進度計劃，表 明爲保證工程按期竣工而對原進度計劃所作的修改。 
第三十五條 提交現金流量估算 
35.1 在中標函簽發日之後，承包商應按季度向工程師提交承包商根據合同將 有權得到的全部支付的詳細現金流通量估算，以供其參考。此後，若工程師提出 要求，承包商還應按季度提供修訂的現金流通量估算。詳細的現金流通量估算提 交的時間應爲＿＿天。 
第三十六條 不解除承包商的義務或責任 
36.1 向工程師提交並經其同意的上述進度計劃或提供的上述一般說明或現金 流通量估算，並不解除合同規定的承包商的任何義務或責任。 
第三十七條 承包商的監督 
37.1 只要工程師認爲是爲正確履行合同規定的承包商義務所必需的，承包商 應在工程的施工期間及其後提供一切必要的監督。承包商或經工程師批准的一位 合格的並授權的代表應用其全部時間對該工程進行監督。上述批准可由工程師隨 時撤回。該授權代表應代表承包商接受工程師的指示，或根據第8～11條的規定 接受工程師代表的指示。 
37.2 如果工程師撤回了對代表的批准，承包商在接到此類撤回的通知後，考 慮到下述條款中提及的撤換人員的要求，在實際可能的限度內應儘快將該代表調 離該工程，以後也不得再雇用該員擔任該工程的任何職務，而代之以經工程師批 准的另一代表。 
第三十八條 承包商的雇員 
38.1 承包商應向現場提供與工程施工和竣工以及修補其任何缺陷有關的下述 人員：
（a）熟悉他們各自行業的、有經驗的技術助理及有能力對工程進行正確監督 的工長和領班，以及 
（b）爲使承包商適當並按期履行合同義務所需要的此類熟練的、半熟練的技 工和非技術工人。 
38.2 工程師應有權反對並要求承包商立即從該工程中撤掉由承包商提供的而 工程師認爲是瀆職者或不能勝任工作或玩忽職守的任何人員，以及工程師從其他 方面考慮認爲不宜留在現場的人員，而且無工程師的同意不得允許這些人員重新 從事該工程的工作，從該工程撤走的任何此類人員，應儘快予以更換。 
第三十九條 測定並標示 
39.1 承包商應對下述工作負責： 
（a）根據工程師書面給定的原始基準點、基準線和參考標高，對工程進行準確的放 線。 
 (b) 上述規定的工程所有部分的位置、標高、尺寸及其准線的正確性。 
 (c) 提供與上述工作有關的一切必要的儀器、裝置和勞務。在工程施工 期間的任何時候，如果工程任何部分的位置、標高、尺寸或基準線出現任何 差錯，當工程師要求對此進行糾正時，承包商應以自己的費用糾正此類差錯，以 使工程師滿意。若此類差錯是由工程師以書面形式提供的不正確資料所致，則工 程師應根據第84條的規定決定增加合同價格，並相應地通知承包商，同時將一份 副本呈交雇主。 
39.2 工程師對任何放線工作或任何基準或標高的檢查均不能在任何方面解除 承包商對上述各項的精度所負的責任，承包商應仔細保護的保留好一切水準點、 視准軌、測樁和工程放線所用的其他物件。 
第四十條 鑽孔和勘探開挖 
40.1 在工程施工過程中的任何時間內，如果工程師要求承包商鑽孔，或進行 勘探開挖，則應根據第83條規定以指示形式下達這一要求，但工程量表中已經包 括了涉及此類工作的專案或備用金額者除外。此類勘探開挖應被認爲包括疏浚。 
第四十一條 安全、保衛和環境保護 
41.1 在工程施工、竣工及修補其任何缺陷的整個過程中，承包商應當： 
（a）高度重視所有授權駐在現場的人員的安全，並保持現場和工程的井然有序，以免發生人身事故； 
（b）爲了保護工程，或爲了公�憚漲w全和方便，或爲了其他原因，在確有必 要的時間和地點，或在工程師或任何有關當局提出要求時，自費提供並保持一切 照明、防護、圍欄、警告信號和看守；以及 
（c）採取一切合理的步驟，以保護現場及其附近的環境，並避免由其施工方 法而引起的污染、雜訊或其他後果對公�撲y成人身或財物方面的傷害或妨礙。 
第四十二條 雇主的責任 
42.1 根據第66條的規定，如果雇主用自己的工作人員在現場工作，在這方 面他應當： 
（a）對所有授權在現場的人員的安全負全面責任；以及 
（b）保持現場的井然有序，以防對這些人員造成危險。 
42.2 如果根據第66條的規定，雇主在現場還雇用其他承包商時，雇主應同 樣地要求這些承包商在安全和避免危險方面負同樣責任。 
第四十三條 工程的照管 
43.1 從工程開工日期起算到頒發整個工程的移交證書的日期止，承包商應對 工程以及材料和待安裝的工程設備等的照管負完全責任。照管工程的責任應隨移 交證書一起移交給雇主。但 
（a）如果工程師爲永久工程的某一區段或部分頒發了移交證書，則承包商從 頒發移交證書之日起，即應停止對那一區段或部分的照管責任，此時對那一區段 或部分的照管責任移交給雇主; 
（b）承包商應對那些在缺陷責任期內他應予完成的任何未完成的工程及供工 程使用的材料和工程設備的照管負完全責任，直至此類未完成的工程根據第82條 的規定完工爲止。 
第四十四條 彌補損失或損壞的責任 
44.1 在承包商負責照管期間，如果工程或其任何部分或待用的材料或設備出 現任何損失或損壞，除第46.1條限定的風險情況外，不論出於什�洎鴞]，承包商 均應自費彌補此類損失或損壞，以使永久工程在各方面符合合同的規定，達到工 程師滿意的程度。按照第82條對承包商責任的規定，承包商亦應對其在進行作業 過程中造成的對工程的任何損失或損壞承擔責任。
第四十五條 由於雇主風險造成的損失或損壞 
45.1 當任何此類損失或損壞是由於第46.1條所限定的任何風險造成的，或 是與其他風險相結合造成時，若工程師提出要求，則承包商應按該要求的程度修 補這些損失或損壞，而工程師應按第84條的規定決定增加合同價格，並應相應地 通知承包商，同時將一份副本呈交雇主。如果是由於多種風險相結合造成的損失 或損壞，則工程師在作出上述決定時，應考慮到承包商和雇主的責任所占的比例。 
第四十六條 雇主的風險 
46.1 雇主的風險是指： 
 (a) 戰爭、敵對行動、入侵、外敵行動； 
 (b) 叛亂、革命、暴動，或軍事政變或篡奪政權，或內戰； 
 (c) 由於任何核燃料或核燃料燃燒後的核廢物、放射性毒氣爆炸，或任何爆 炸性核裝置或核成分的其他危險性能所引起的離子輻射或放射性污染； 
 (d) 以音速或超音速飛行的飛機或其他飛行裝置産生的壓力波； 
 (e) 暴亂、騷亂或混亂，但對於完全局限于承包商或其分包商雇用人員中間 且是由於從事本工程而引起的此類事件除外； 
 (f) 由於雇主使用或佔用合同規定提供給他的以外的任何永久工程的區段或 部分而造成的損失或損害； 
 (g) 因工程設計不當而造成的損失或損壞，而此類設計又不是由承包商提供 或由承包商負責的； 
 (h) 一個有經驗的承包商通常無法預測和防範的任何自然力的作用。 
     第四十七條 工程和承包商設備的保險 
47.1在不限制第43一36條中規定的承包商和雇主的義務和責任的責任下， 承包商應： 
 (a) 以全
 (b) 以重置成本15％的部重置成本對工程連同材料和工程配套設備進行保險； 
 附加金額，以補償修復損失和損害的任何附加費用以 及由此修復引起的額外費用，包括業務費以及拆除和遷移工程的任何部分和遷移 任何性質的廢棄物的費用； 
 (c) 投保承包商運至現場的承包商的設備和其他物品，以得到一筆足夠在現 場能重置這些設備和物品的金額。
第四十八條 投保範圍 
48.1 對於第47.1條中的（a）和（b）兩項中的保險，應以承包商和雇主的 聯合名義進行投保，並應包括： 
（a）從現場開始工作至頒發有關工程或其任何區段或部分的移交證書爲止， 雇主和承包商遭受的除第50.1條規定的情況以外的由任何原因所引起的全部損失 或損害；以及 
（b）由承包商負責的，在缺陷責任期內，由發生於缺陷責任期開始之前的原 因造成的損失或損害；爲履行第82條規定的承包商義務而進行的任何作業過程中 由他造成的損失或損害。 
第四十九條 未能取得的金額的責任 
49.1 任何未保險的或未能從承保人那裏收回的金額，應由雇主或承包商根據 第43～46條的規定承擔責任。 
第五十條 除外專案 
50.1 第47.1條中所述的保險，對由於下列原因造成的損失或損害不應承擔 義務： 
（a）戰爭、敵對行動、入侵、外敵行動； 
（b）叛亂、革命、暴動，或軍事政變或篡奪政權，或內戰； 
（c）由於任何核燃料或其燃燒後的核廢物、放射性毒氣爆炸，或任何爆炸 性核裝置或核成分的其他危險性能所引起的離子輻射或放射性污染； 
（d）以音速或超音速飛行的飛機或其他飛行裝置産生的壓力波。 
第五十一條 人身或財産的損害 
51.1 除合同另有規定外，承包商應保障雇主免于承受與下述有關的任何損失 或索賠： 
（a）任何人員的死亡或受傷；或者 
（b）任何財産的損失或損害，但工程除外。 
51.2 上述人身或財産的損害系在工程實施和完成以及修補其任何缺陷過程中 發生的，或由其引起的，同時還應保障雇主免受爲此或與此有關的一切索賠、訴 訟、損害賠償費、訴訟費、指控費和其他費用，但下述所限定的情況除外：
(a) 工程或工程的任何部分所永久使用或佔有的土地； 
 (b) 雇主在任何土地上、越過該土地、在該土地之下、之內或穿過其間實施 工程或工程的任何部分的權利； 
 (c) 按合同規定實施和完成工程以及修補其任何缺陷所導致的無法避免的對 財産的損害； 
 (d) 由雇主、雇主的代理人、雇員或不是該承包商雇用的其他承包商的任何 行爲或疏忽造成的人員傷亡或者財産的損失或損害，爲此或彼此有關的任何索賠、 訴訟、損害賠償費、訴訟費、指控費及其它費用，或者是當承包商、其雇員或代 理人也對這類損傷或損害負有部分責任時，應公平合理地考慮到與雇主、其雇員 或代理人、或其他承包商對該項損傷或損害所負責任程度相應的那一部分損傷或 損害。 
第五十二條 雇主提供的保證 
52.1 雇主應保證承包商免於承擔有關第51．2款所述的例外情況的一切索賠、 訴訟、損害賠償費、訴訟費、指控費及其它費用。 
第五十三條 第三方保險 
53.1 在不限制第51條規定的承包商和雇主的義務和責任的條件下，承包商 應以承包商和雇主的聯合名義，對由於履行合同引起的任何人員或工程以外的任 何財産的損失或損害進行責任保險，但第51.2條中第（a）、（b）和（c）項限定 的情況除外。此項保險金額至少應爲投標書附件中所規定的數額。 
53.2 保險單中應包括一條交叉責任條款，使該保險對分別保險的承包商和雇 主均適用。 
第五十四條 人員的事故或受傷 
54.1 除非死亡或受傷是由雇主及其代理人或雇員的任何行爲或過失所造成的， 雇主應對承包商或任何分包商雇用的任何人或其他人員的任何損害賠償或補償支 付不承擔責任。承包商應保障並持續保障雇主不承擔除上述雇主應負責者外的一 切損害賠償和補償，以及與此有關的一切索賠、訴訟、損害賠償費、訴訟費、指 控費及其它開支。 
第五十五條 人員的事故保險
55.1 承包商應對他爲此工程雇用的任何人員進行此種責任保險，並應在全部 雇用期間內持續上述保險。但對於任何分包商雇用的任何人員，如該分包商已對 上述人員進行了責任保險，這樣雇主就根據保險單得到保險，則本款前述的承包 商保險義務即得到履行，但在需要時，承包商應要求此分包商向雇主出示此項保 險的保險單及本期保險金的支付收據。 
第五十六條 保險證據和保險條款 
56.1 承包商應在現場工作開始之前向雇主提供證據，說明按照合同要求投保 的險種已經生效，並應在開工之日起84天之內向雇主提供保險單。在向雇主提供 上述證據和保險單時，承包商應同時將此情況通知工程師。上述保險單應與中標 函簽發前所同意的總條件一致。承包商應根據雇主同意的條件，在承保人處投保 其負責的所有保險專案。 
第五十七條 保險的充分性 
57.1 承包商應把工程施工的性質、範圍或進度計劃方面的變化情況通知承保 人，並保證按合同條款在整個期間內有完備的保險。並在需要時，向雇主出示生 效的保險單及本期保險費的支付收據。 
第五十八條 對承包商未辦保險的補救 
58.1 若承包商未按合同要求進行任何投保並保持其有效，或者未在第57．1 款要求的期限內向雇主提供各項保險單，則在任何此種情況下，雇主均可以進行 任何此類保險並保持其有效，支付爲此目的可能需要的任何保險費，並可隨時從 任何應付或將付給承包商的款項中扣除上述支付的費用，或視爲到期債款向承包 商收回上述費用。 
第五十九條 遵守保險單規定的條件 
59.1 若承包商或雇主未能遵守根據合同生效的保險單規定的條件，責任方應 保證另一方免受此類失誤而造成的一切損失和索賠。
第六十條 遵守法令、規章 
60.1 承包商應在一切方面，包括發出所有的通知和交納所有的費用，均應遵 守下列規定：（a）與該工程的施工、竣工以及修補其任何缺陷有關的任何國家或地方的法 律、法規、規章，或任何地方或其他正式合法部門的實施細則；以及 
（b）其財産或權利受到或可能受到該工程以任何方式影響的公共團體和公司 的規章制度。 
承包商應保證雇主免于承擔由於違反上述任何此類規定的任何罰款和責任。 但雇主應負責獲得工程進行所需要的任何規劃、區域劃分或其他類似的批准，並 應根據第52.1條的規定對承包商給予保障。 
第六十一條 化石的保護 
61.1在工程現場發掘出的所有化石、硬幣、有價值的物品或文物、建築結構 以及具有地質或考古價值的其他遺�[或物品，就雇主和承包商之間而言，均應視 爲屬於雇主的絕對財産。承包商應採取合理的預防措施，防止其工人或其他任何 人員移動或損壞任何此類物品，並且一旦發現上述物品，應在移動之前，立即將 此類發現通知工程師，並執行工程師關於處理上述物品的指示。如果由於此類指 示造成承包商進度之延誤或費用之增加，則工程師應在與雇主和承包商協商之後， 作出如下決定： 
   （a）根據第77條規定，給予承包商獲得任何延長工期的權利，以及 
（b）在合同價格中加上此類費用的數額，並相應地通知承包商，同時將一份 副本呈交雇主。 
第六十二條 專利權 
62.1 承包商應保護和保障雇主免于承擔由於工程所用的或與工程有關的或供 工程使用的任何承包商的設備、材料或工程設備方面侵犯任何專利權、設計商標 或名稱或其他受保護的權利而引起的一切索賠和訴訟，並應保護和保障雇主免于 承擔由於導致或與此有關的一切損害賠償費、訴訟費、指控費和其他費用，但如 果此種侵犯是由於遵照工程師提供的設計或技術規範引起者除外。 
第六十三條 礦區使用費 
63.1 除另有規定外，承包商應支付工程所需的石料、砂、礫石、粘土或其他 各種材料的一切噸位費和其他礦區使用費、租金及其它支出或賠償費。 
第六十四條 對交通和毗鄰財産的干擾
64.1 在符合合同要求的範圍內，在進行工程的施工以及修補其任何缺陷所必 需的一切操作時，不應給下列各方帶來不必要和不適當的干擾： 
（a）公�憚澈K利；或者 
（b）公用道路或私人道路，以及通往或屬於雇主或任何他人所有財産的人行 道的進入、使用或佔用。 
64.2承包商應保護和保證雇主免于承擔由承包商負責的上述事項所導致的或 與之有關的一切索賠、訴訟、損害賠償費、訴訟費、指控費及其它費用。 
第六十五條 避免損壞道路 
65.1 承包商應採取一切合理的措施，防止承包商或其任何分包商的任何運輸 對連接現場的或通往現場的道路或橋梁造成破壞或損傷，承包商特別應該選擇運 輸線路，選用運輸工具，限制和分配載運重量，以便使來往於現場的材料、工程 設備、承包商設備或臨時工程運送所不可避免出現的任何這類特殊交通運輸受到 盡可能合理的限制，從而避免對這些道路和橋梁造成不必要的損害或損傷。 
65.2 除合同另有規定外，爲了便利承包商的設備或臨時工程的運輸，承包商 應負責對通往現場或位於通往現場路線上的任何橋梁的加固或道路的改建或改善， 並支付其費用，並且應持續保障雇主免于承擔由於此類運輸造成任何橋梁和道路 損害而引起的一切索賠，包括可能直接向雇主提出的此類索賠，承包商應出面談 判並支付純粹由此類損害而引起的一切索賠。 
65.3 儘管有第65.1條的規定，但如果發生因運輸材料或設備而對通往現場 或位於通往現場路線上任何橋梁或道路造成任何損害時，承包商在得知此類損害 之後，或者收到有權提出此類索賠機構的任何索賠要求之後，應立即通知工程師， 並將一份副本呈交給雇主。當根據任何法律或規章規定，要求該材料或設備的承 運人給予道路管理機構損害賠償時，雇主不應對與此有關的訴訟費、指控費和其 它費用負責。在其他情況下，雇主則應協商解決和支付有關此類索賠的全部金額， 並且應保障承包商免於承擔此類和與此有關的一切索賠、訴訟、損害賠償費、訴 訟費、指控費和其他費用。但如果工程師認爲上述任何索賠或其中的一部分實屬 承包商一方未能遵守或履行第30.1條規定的承包商的義務所致，則工程師在與雇 主和承包商協商之後確定因上述失誤應賠償的總額，雇主應從承包商處收回該款 項，亦可由雇主從任何應付或將付給承包商的任何款項中扣除，工程師應相應地 通知承包商，並將一份副本呈交雇主，但無論何時，雇主應將要協商的解決辦法及承包商可能償還的任何總額通知承包商，雇主應在此類解決辦法達成協定之前 與承包商進行協商。 
65.4 在工程師要求承包商使用水路運輸時，本條上述各項規定的術語“道路” 應解釋爲：包括水閘、碼頭、海堤或與水路有關的其他結構物，而“運輸工具”一 詞的含義應包括船舶，而且具有與上述規定相應的效力。 
第六十六條 爲其他承包商提供機會 
66.1 根據工程師的要求，承包商應爲下列人員從事其工作提供一切合理的機 會： 
（a）雇主所雇用的任何其他承包商及其工人； 
（b）雇主的工人； 
（c）任何正式合法機構的工人。 
這些工人可能被雇主雇用，在現場或現場附近實施該合同未包括的任何工作 或實施雇主可能參與的與該工程有關或附屬於該工程的任何合同。 
66.2 如果工程師提出書面要求，根據第66.1條規定，承包商應： 
（a）將承包商負責維修保養的任何道路或通道，提供給上述任何其他承包 商或雇主或任何此類機構使用；或 
（b）允許上述各方使用臨時工程或承包商在現場的設備或 
（c）爲上述各方提供任何性質的任何其他服務。工程師應根據第84條規定 確定一項追加費用，添列于合同價格中，並應將此決定相應地通知承包商，同時 將一份副本呈交雇主。 
第六十七條 承包商保持現場整潔 
67.1 在工程施工期間，承包商應合理地保持現場不出現不必要的障礙物，存 放並處置好承包商的任何設備和多餘的材料並從現場清除運走任何廢料、垃圾或 不再需要的臨時工程。 
67.2 在頒發任何移交證書時，承包商應從該移交證書所涉及的那部分現場清 除並運出承包商的全部設備、多餘材料、垃圾和各種臨時工程，並保持該部分現 場和工程清潔整齊，達到使工程師滿意的使用狀態。但承包商應有權在現場保留 爲完成承包商在缺陷責任期內的各項義務所需的那些材料、承包商的設備和臨時 工程，直至缺陷責任期結束。

第七章 勞動力

第六十八條 職員和勞務人員的雇用 
68.1 除合同另有規定外，承包商應自行安排非當地或其他地方雇用的所有職 員和勞務人員，以及他們的報酬、住房、膳食和交通。 
第六十九條 勞務人員和承包商設備情況的報告 
69.1 如果工程師提出要求，承包商應按工程師可能預先規定的某種格式和時 間間隔，向工程師送交表明承包商在現場隨時雇用的職員及各種等級的勞務人數 的詳細報告；當工程師可能需要時，還應送交有關承包商設備的此類報告。 

第八章 材料、工程設備和工藝
第七十條 材料、工程設備和工藝的質量 
70.1 一切材料、工程設備和工藝均應： 
 (a) 爲合同中所規定的相應的品級，並符合工程師的指示要求； 
 (b) 隨時按工程師提出的要求，在製造、裝配或準備地點，或在現場、或在 合同可能規定的其他地點或若干地點，或在上述所有地點或其中任何地點進行檢 驗。 
70.2 承包商應爲檢驗、測量和檢驗任何材料或工程設備提供通常需要的協助、 勞務、電力、燃料、備用品、裝置和儀器，並應在用於工程之前，按工程師的選 擇和要求，提交有關材料樣品，以供檢驗。 
第七十一條 費用 
71.1 如果說明書或工程清單中已明確指明或規定提供樣品，則全部樣品應由 承包商自費提供。 
71.2 若檢驗屬於下列情況，則承包商應負擔任何此類檢驗費用： 
 (a) 在合同中已明確指明或規定的；或者 
 (b) 在合同中作出足夠詳細的說明，使承包商能在其投標書中標價或便於標 價的。 
71.3 若工程師要求的任何檢驗屬於下列情況之一者：
   （a）合同中未指明或規定者；
(b) 在上述情況下未作出專門說明者； 
 (c) 雖已指明或規定，但工程師所要求的檢驗是在現場以外的任何地點，或 在被檢驗的材料或工程設備的製造、裝配或準備地點以外的任何地點進行者；如 果檢驗表明材料、工程設備或工藝未按合同規定使工程師滿意，則其檢驗費用應 由承包商負擔。否則，應按第71.4條規定處理。 
71.4 凡符合第71.3條規定者，本款即應適用，工程師應在與雇主和承包商 協商之後，作出決定，並相應地通知承包商，同時將一份副本呈交雇主： 
 (a) 根據第77條規定，承包商有權獲得任何延長的工期；以及 
 (b) 應在合同價格中增加的有關費用總額。 
第七十二條 檢查和試驗 
72.1 工程師及其任何授權人員在一切合理的時間內應能進入現場及進入正在 爲工程製造、裝配或準備材料或工程設備的所有車間和場所，承包商應爲這種進 入提供一切便利並協助取得進入上述場所的權利。 
72.2 工程師有權對按合同規定供應的材料和工程設備在其製造、裝配或準備 過程中進行檢查和檢驗。如果材料和工程設備的製造、裝配或準備的車間或場所 不屬於承包商，則承包商應取得爲工程師在這些車間或場所進行此類檢查或檢驗 的許可。此類檢查或檢驗不應解除合同規定的承包商的任何義務。 
72.3 承包商應同工程師商定對按合同規定的任何材料和工程設備進行檢查或 檢驗的時間和地點，工程師應將其進行檢查或參加檢驗的意向提前24小時通知承 包商。如果工程師或其正式授權代表未在商定的檢驗時間參加檢驗，除工程師另 有指示外，承包商可進行此項檢驗並應認爲是工程師在場的情況下進行的。承包 商應立即將該項檢驗資料的正式核實的副本送交工程師。如果工程師未參加該項 檢驗，工程師應對檢驗資料的準確性給予認可。 
72.4 如果在按第72.3條商定的時間和地點，供檢查和檢驗的材料或工程設 備未準備好，或者按本款規定所作的檢查或檢驗結果，工程師確認材料或工程設 備是有缺陷的或者是不符合合同規定的，則工程師可拒收這些材料或工程設備， 並應立即通知承包商。該通知書應寫明工程師拒收的原因。承包商應即刻糾正所 述缺陷或保證被拒收的材料或工程設備符合合同規定。如果工程師提出要求，應 對被拒收的材料或工程設備按相同的條款和條件進行檢驗或重復檢驗。工程師應 在與雇主和承包商協商之後，確定出雇主爲進行該項重復檢驗所需的全部費用， 並由雇主從承包商處收回，亦可由雇主從任何應支付或將支付給承包商的款項中扣除，工程師應相應地通知承包商，並將一份副本呈交雇主。 
72.5 工程師可將材料或工程設備的檢查和檢驗委託給一名獨立的檢查員進行。 根據第9.4條規定，任何此類委託應是有效的，並應把爲上述目的委託的獨立檢查 員看作是工程師的一名助理。工程師應提前14天將這種任命通知承包商。 
72.6 未經工程師批准，工程的任何部分均不得覆蓋或使之無法查看，承包商 應保證工程師有充分的機會，對將覆蓋或無法查看的工程的任何部分進行檢查或 測量，以及對工程的任何部分將置於其上的基礎進行檢查。無論何時，當工程的 任何部分或基礎已經或即將作好檢查準備時，承包商應通知工程師，除工程師認 爲無必要檢查並相應地通知承包商外，工程師應參加工程的此部分的檢查和測量 或此類基礎的檢查，且不得無故拖延。 
72.7 承包商應按工程師可能隨時發出的指示，移去工程的任何部分的覆蓋物， 或在其內或貫穿其中開孔，並應將該部分恢復原狀使之完好。如果任何這部分根 據84.6條的要求已覆蓋或掩蔽，並經查明其施工符合合同要求，則工程師應在及 時與雇主和承包商協商之後，確定承包商由於該項剝露、在其內或貫穿其中開孔、 恢復原狀和使之完好所開支的費用總額，並應將此總額增在合同價格中，工程師 應將此情況相應地通知承包商，同時將一份副本呈交雇主。任何其他情況下的一 切費用均應由承包商承擔。 
72.8 工程師有權隨時對下列事項發出指示： 
（a）在指示規定的時間內一次或分幾次將工程師認爲不符合合同規定的任何 材料或工程設備從現場運走； 
（b）用合格適用的材料或工程設備取代；以及 
（c）儘管事先已對其進行過任何檢驗或臨時付款，但對工程師認爲在以下方 面不符合合同規定的任何工程，均應拆除並適當地重新施工：（1）材料、工程設 備或工藝；或（2）由承包商設計或承包商對其負有責任的設計。 
72.9 如果承包商在指示規定的時間內，若指示中未規定時間，則在合理的時 間內，未執行上述指示時，雇主應有權雇用他人執行該項指示，並向其支付有關 費用。工程師應在與雇主和承包商及時協商之後，確定由此産生的全部費用，並 由雇主從承包商處收回，亦可由雇主從任何應支付或將支付給承包商的任何款項 中扣除，工程師應相應地通知承包商，並將一份副本呈交雇主。 

第九章 暫停

第七十三條 暫時停工 
73.1 承包商應根據工程師的指示按工程師認爲必要的時間和方式暫停工程或 其任何部分的進展，在暫時停工期間承包商應對工程對其一部分進行工程師認爲 必要的保護和安全保障，除下列情況以外的暫時停工，應適用第73.2款： 
 (a) 在合同中另有規定者；或 
 (b) 由於承包商某種違約引起的或由其負責的必要的停工；或 
 (c) 由於現場氣候條件導致的必要的停工；或 
 (d) 爲工程的合理施工或爲工程或其任何部分的安全必要的停工。 
73.2 在根據第73.1條而適用本款規定時，工程師應與雇主和承包商適當協 商，並作出如下決定： 
(a) 根據第77條規定，給予承包商延長工期的權利；以及 
    (b) 在合同價格中增加由此類暫時停工引起的承包商支出的費用款額，工程 師應通知承包商，並將一份副本呈交雇主。 
73.3 如果暫停是根據工程師的書面指示，並且自停工之日起84天內，工程 師未發出復工的許可，除非停工屬於第73.1條規定的情況，則承包商可向工程師 遞送通知，要求工程師自接到該通知後的28天內准許已中斷的工程或其部分繼續 施工。如果在上述時間內未得到批准復工，則承包商可以作如下選擇：當暫時停 工僅影響工程的局部時，承包商可按第83條規定，將此項停工視爲可刪減的工程， 同時對此再次向工程師遞送通知，或者當暫時停工影響到整個工程時，承包商則 可將此項停工視爲雇主違約，並根據合同第101.1條規定終止其被雇用的義務，此 時應執行第101.2和101.3條的規定。 

第十章 開工和延誤

第七十四條 工程的開工 
74.1 承包商在接到工程師有關開工的通知後，應在合理可能的情況下儘快開 工，開工通知應在中標函頒發日期之後，在投標書附件中規定的期限內發出。此 後，承包商應迅速且毫不遲延開始工程的施工。 
第七十五條 現場佔有權及其通道 
75.1 除合同另有規定外： 
（a）隨時給予承包商佔有現場各部分的範圍；以及
（b）承包商可佔用現場各部分的順序。 
並根據合同中對於工程竣工順序的任何要求，在工程師發出開工通知的同時， 雇主應使承包商佔有： 
（c）一定大小的所需部分現場；以及 
（d）按照合同由雇主提供的此類通道。 
以便使承包商能夠根據第34條提到的工程進度計劃開始並進行施工，否則， 將根據承包商提出的合理建議開工。此時應將該建議通知工程師，並將一份副本 呈交雇主。雇主應隨工程進展，適時讓承包商佔用工程施工所需現場的其他部分， 以使承包商能以應有的速度並視具體情況或按上述進度計劃或按承包商的合理建 議進行工程施工。 
75.2 如果由於雇主未能按第75.1條規定給出上述佔有權而導致承包商延誤 工期和／或付出費用，則工程師應在及時與雇主和承包商協商之後，作出如下決 定： 
（a）根據第77條規定，承包商有權獲得任何延長的工期；以及 
（b）應在合同價格中增加此類費用總額。 
工程師應通知承包商，並將一份副本呈交雇主。 
75.3 承包商應承擔其進出現場所需要的專用或臨時道路通行權的一切費用的 開支。承包商還應自費提供他所需要的供工程使用的位於現場以外的任何附加設 備。 
第七十六條 竣工時間 
76.1 在投標書附件中規定的某一具體時間內竣工的整個工程及任何區段，應 按第81條的規定，在投標書附件中爲整個工程或任何區段規定的從開工之日算起 的期限內竣工；或在第77條可能允許的延長工期內竣工。 
第七十七條 竣工期限的延長 
77.1 如果由於： 
（a）額外或附加工作的數量或性質，或 
（b）本合同中提到的任何誤期原因，或 
（c）異常惡劣的氣候條件，或 
(d) 由雇主造成的任何延誤、干擾或阻礙，或 
(e) 除去承包商不履行合同或違約或由他負責的以外，其他可能發生的特殊情況，使承包商有理由延期完成工程或其任何區段或部分，則工程師應在與雇主 和承包商適當地協商之後，決定竣工期延長的時間，並相應地通知承包商，同時 將一份副本呈交雇主。 
77.2 但工程師不一定必須作出任何決定，除非承包商已經： 
（a）在此類事件開始發生之後的28天內通知工程師並將一份副本呈交雇主， 以及 
（b）在上述通知後的28天內，或在工程師可能同意的其他合理的期限內，向 工程師提交承包商認爲他有權要求的任何延期的詳細申述，以便可以及時對他申 述的情況進行研究。 
77.3 如果某一事件具有持續性的影響，以致使要求承包商按77.2（b）款所 述的28天內提交詳細申述成爲不可能時，如果承包商以不超過28天的間隔向工 程師遞交臨時詳情，並在事件影響結束後28天內提交了最終詳情，承包商仍有權 要求延長工期。工程師在收到上述詳情報告後，不得無故延誤，應作出關於延長 工期的臨時決定，在收到最終詳情之後，工程師應復查全部情況，並提出有關該 事件所需的延長全部工期的決定。在上述兩種情況下，工程師在與雇主和承包商 適當協商之後作出決定，並將此決定通知承包商，同時將一份副本呈交雇主。終 審結果不應導致減少工程師業已決定的任何延長工期的時間。 
第七十八條 工作時間的限制 
78.1 在合同中無相反規定的條件下，除下文規定的情況外，非經工程師同意， 任何工程均不得在夜間或當地公認的休息日施工，但爲搶救生命或財産，或爲工 程的安全而不可避免或絕對必要的作業除外，在此情況下，承包商應立即向工程 師提出建議。但本款規定不適用於習慣上採用多班制的任何作業。 
第七十九條 施工進度 
79.1 在承包商無任何理由要求延長工期的情況下，如工程師認爲工程或其任 何區段在任何時候的施工進度太慢，不符合竣工期限要求，則工程師應將此情況 通知承包商，承包商即在工程師的同意之下，採取必要的步驟，加快工程進度，以 使其符合竣工期限要求。承包商無權要求爲採取這些步驟支付附加費用。如果由 于執行工程師按有關條款規定發出的任何通知，承包商認爲有必要在夜間或當地 公認的休息日進行任何工作，則承包商有權請求工程師對此給予准許。如果承包 商根據本條規定的承包商義務所採取的任何步驟，使雇主開支了附加管理費，則工程師應在與雇主和承包商適當協商之後，確定該項費用款額，並應由承包商償 還給雇主，亦可由雇主從任何應支付或將支付給承包商的任何款項中扣除，工程 師應相應地通知承包商，並將一份副本呈交雇主。 
第八十條 誤期賠償費及其減讓 
80.1 如果承包商未能按第81條規定的全部工程竣工期限完成整個工程，或 未能在第76條規定的時間內完成任何區段，則承包商應向雇主支付投標書附件中 寫明的相應金額作爲該項違約的損害賠償費，而不是作爲自相應的竣工期限起至 頒發整個工程或相應區段的移交證書之日止之間的每日或不足一日的罰款，但上 述損害賠償費應限制在投標書附件中注明的前提下，雇主可從應支付或將支付給 承包商的任何款項中扣除該項損害賠償費。此損害賠償費的支付或扣除不應解除 承包商對完成該項工程的義務或合同規定的承包商的任何其他義務和責任。 
80．2 在整個工程或任何區段的竣工期限之前，如果工程或區段的任何部分 已簽發移交證書，則在合同中無替代條款的情況下，對於在該移交證書注明的日 期之後的任何拖延期間該工程或區段剩餘部分的誤期損害賠償費，應按已簽發部 分的價值對整個工程或區段的價值比例相應地減少。本款的規定僅適用於誤期損 害賠償費的比率，並不應影響上述限額。 
第八十一條 移交證書 
81.1 當全部工程基本完工並圓滿通過合同規定的任何竣工檢驗時，承包商可 將此結果通知工程師，並將一份副本呈交雇主，同時附上一份有缺陷責任期內以 應有速度及時地完成任何未完工作的書面保證。此項通知書和書面保證應視爲承 包商要求工程師頒發移交證書的申請。工程師應于上述通知書發出之日起21天 內，或發給承包商一份移交證書，說明工程師認爲根據合同要求工程已基本完工 的日期，並將一份副本呈交雇主；或給承包商書面指示，經工程師的意見詳細說 明在頒發該證書之前，承包商尚需完成的全部工作。工程師還應向承包商指出工 程中影響基本竣工的任何缺陷，這些缺陷可能會在此所說的給出書面指示之後和 工程竣工之前出現。承包商在完成預定工程和修補好所指出的任何缺陷，並使工 程師滿意後，有權在21天內收到上述移交證書。 
81.2 同樣，根據第81.1條規定的程式，承包商可以要求工程師，而工程師 也應就下列各項簽發移交證書： 
（a）投標書附件中規定有不同竣工時間的任何區段；或（b）已經竣工且工程師認爲滿意並且已被雇主所佔有或使用的永久工程的任 何主要部分，但合同另有規定者除外；或 
（c）在竣工之前已由雇主選擇佔有並使用的永久工程的任何部分。 
81.3 如果永久工程的任何部分已基本竣工，並圓滿地通過了合同規定的任何 竣工檢驗，那�泵b全部工程竣工之前，工程師可就該永久工程的一部分頒發移交 證書，且一經發給此類證書，即視爲承包商已承擔在缺陷責任期內及時迅速地完 成該部分永久工程的任何未完成的工作。 
81．4 在全部工程竣工之前發給的關於永久工程任何區段或部分的移交證書， 不應認爲是證明任何需要恢復原狀的場地或地表面的工作已經完成，除非該移交 證書對此有明確的說明。 

第十一章 缺陷責任

第八十二條 缺陷責任期 
82.1 在本合同中，缺陷責任期是指投標書附件中指定的缺陷責任期間，並從 下列時間起算： 
（a）從工程師根據第81條證明的工程竣工的日期；或者 
（b）在工程師根據第81條簽發了一份以上證書的情況下，各個被證明了的 日期。 
82.2 爲在缺陷責任期滿後立即或一旦可行即按合同要求的條件並以使工程師 滿意的狀態將工程移交給雇主，承包商應 
（a）在移交證書注明的日期之後，切實儘快地完成在當時尚未完成的工作； 以及 
（b）按工程師的要求或以工程師名義在缺陷責任期滿之前進行檢查後，指 示承包商修補、重建和補救缺陷、收縮或其他毛病時，承包商應在缺陷責任期內 或期滿後的14天內實施工程師可能指示的上述所有工作。 
82.3 如果工程師認爲上款所述工作的必要性是由於下列情況之一引起的，則 所有此類工作應由承包商以自己的費用進行： 
 (a) 所用材料、設備或工藝不符合合同要求； 
 (b) 當由承包商負責設計的部分永久工程出現了任何失誤； 
（c）由於承包商的疏忽或者未能按合同規定履行承包商方面的明確的或隱含 的任何義務。
如果工程師認爲上述工82.4 當承包商未作的必要性是由於任何其他原因造成的，則工程師應根據第84條確定在合同價格中增加一筆款額，並相應地通知承包商，同時將一份 付本呈交雇主。 
能在合理的時間內執行這些指示時，雇主有權雇用他人從事 該項工作，並給付報酬。如果工程師認爲該項工作按合同規定應由承包商自費進 行，則在與雇主和承包商協商之後，工程師應確定所有由此造成或隨之産生的費 用，此費用應由雇主向承包商索取，並可由雇主從其應支付或將支付給承包商的 款項中扣除，工程師應相應地通知承包商，並將一份副本呈交雇主。 
82.5 如果缺陷責任期滿之前的任何時間，工程出現任何缺陷、收縮或其他不 合格之處，工程師可指示承包商在工程師的指導下，調查上述情況下的原因，並 將副本呈交雇主。除非按合同規定，上述缺陷、收縮或其他不合格之處應屬承包 商的責任，否則工程應在與雇主和承包商協商之後，確定承包商由於上述調查所 支出的費用總額，並應將其增加到合同價格中，工程師應相應地通知承包商，並 將一份副本呈交雇主。如上述缺陷、收縮或其他不合格之處是承包商的責任，則 上述有關調查工作的費用應由承包商承擔。在此種情況下，承包商應按第82條規 定自費修補上述缺陷、收縮或其他不合格之處。 

第十二章 變更

第八十三條 變更 
83.1 如果工程師認爲有必要對工程或其中任何部分的形式、質量或數量作出 任何變更，爲此目的或出於任何其他理由，工程師認爲上述變更適當時，他應有 權指示承包商進行而承包商也應進行下列任何工作： 
（a）增加或減少合同中所包括的任何工作的數量； 
（b）省略任何這類工作； 
（c）改變任何此類工作的性質、質量或類型； 
（d）改變工程任何部分的標高、基線、位置和尺寸； 
（e）實施工程竣工所必要的任何種類的附加工作； 
（f）改變工程任何部分的任何規定的施工順序或時間安排。 
上述變更不應以任何方式使合同作廢或失效，但對所有上述變更的影響應按 第84條估價。凡是由於承包商的違約或毀約或他對此負有責任，使工程師有必要 發出指示變更工程，則任何由此類違約造成的附加費用應由承包商承擔。
83.2 沒有工程師的指示承包商不得作任何變更。當工程量的增加或減少不是 因按本條發出的指示所造成的，而是由於工程量超出或少於工程量表中所規定者， 則不必發出增加或減少工程量的指示。 
第八十四條 變更的估價 
84.1 第83條所述的所有變更以及按照第84條要求予以確定的合同價格的任 何增加，如工程師認爲適當，應以合同中規定的費率及價格進行估價。如合同中 未包括適用於該變更工作的費率或價格，則應在合理的範圍內使用合同中的費率 和價格作爲估價的基礎。如做不到這一點，在工程師與雇主和承包商協商之後，工 程師和承包商應商定一個合適的費率或價格。當雙方意見不一致時，工程師應確 定他認爲合適的此類費率或價格，並相應地通知承包商，同時將一份副本呈交雇 主。在費率或價格經同意或決定之前，工程師應確定暫行費率或價格，以使有可 能作爲暫付款包含在按第92條發出的證書中。 
84.2 如果任何變更了的工作性質或數量關係到整個工程或其中任何部分的性 質和數量，在此情況下，工程師認爲由於該變更工作，合同中包括的任何工程項 目的費率或價格已變得不合理或不適用時，則在工程師與雇主和承包商適當協商 後，由工程師與承包商議定合適的費率或價格。如未能達成一致意見，則工程師 應確定他認爲適當的此類另外的費率或價格，並相應地通知承包商，同時將一份 付本呈交雇主。在費率或價格經同意或決定之前，工程師應確定暫行費率或價格 以便有可能作爲暫付款包含在按第92條發出的證書之中。同時，由工程師根據第 83條指示而進行的變更工作不應按83.1款或本款進行估價，除非在上述指令發出 後14天內，以及在變更工作開始之前，應發出下列通知之一： 
 (a)由承包商將其索取額外付款或者變更費率或價格的意圖通知工程師； 
 (b)由工程師將其變更費率或價格的意圖通知承包商。 
84.3 如果在頒發整個工程的移交證書時，發現由於： 
 (a) 按84.1、84.2條估價的所有變更的工作，以及 
 (b) 對工程量表中開列的估算工程是進行實測後所作的一切調整，不包括暫 定金額，計日工費用及按第102條規定所作的價格調整，而不是由於任何其他原 因，使合同價格的增加或減少值合計起來超過有效合同價（即指不包括暫定金額 及計日工補貼的合同價格）的15％，則在此情況下，經工程師與雇主及承包商協 商之後，應在合同價格中加上或減去承包商與工程師可能議定的另外的款額。如 雙方未能達成一致；此款額應由工程師在考慮合同中承包商的現場費用和總管理費後予以確定。工程師應將根據本款作出的任何決定通知承包商，並將一份副本 呈交雇主。上述金額僅以那些加上或減去超出有效合同價格的15％的款額爲基礎。 
84.4 如果工程師認爲必要或可行時，可以發出指示，規定在計日的基礎上實 施任何變更工作。對此類變更工作應按合同中包對此類按計日工作制實施的工程， 承包商應在該工程持續進行過程中，每天向工程師提交受雇從事該工作的所有工 人的姓名、工種和工時的確切清單一式兩份，以及表明所有該項工程所用和所需 材料和承包商設備的種類和數量的報表一式兩份，根據此類計日工作表中規定的 附加百分比中包括的承包商設備除外。如內容正確或經同意時，工程師將在每種 清單和報表的一份上簽字並退還給承包商。 
在每月月末，承包商應向工程師送交一份除上述以外所用的勞務、材料和承 包商設備的標價的報表。除非已完整按時地提交了此類清單報表，否則承包商無 權獲得任何款項。但如果工程師認爲承包商由於任何原因而不可能根據上述規定 送出此類清單和報表時，他仍然有權批准對此等工作付款，或按受雇的時間，以 及用於該工程的勞務、材料和承包商的設備作爲計日工償付，或按他認爲公平合 理的該工作的價值支付。 

第十三章 索賠程式

第八十五條 索賠通知 
85.1 儘管本合同有任何其他規定，如果承包商根據本合同的任何條款或其他 有關規定打算索取任何追加付款的話，他都應在引起索賠的事件第一次發生後28 天內，將其索賠意向通知工程師，並將一份副本呈交雇主。 
85.2 當第85.1款所指的索賠事件發生時，承包商應在同期記錄。根據第85. 1款，工程師收到通知後，在不必承認雇主責任的情況下，應對此類同期記錄進 行審查並可指示承包商保持合理的同期記錄。這種記錄可用作己發出索賠通知的 補充材料。承包商應允許工程師審查所有根據本款保存的記錄，並在工程師發出 指示時，向工程師提供記錄的副本。 
第八十六條 索賠證明 
86.1 在根據第85.1款發出通知後28天內，或在工程師可能同意的其他合理 的時間內，承包商應送給工程師一份說明索賠款額及提出索賠的依據等詳情材料。 當據以提出索賠的事件具有連續影響時，上述詳細報告應被認爲是臨時詳細報告，承包商應按工程師可能合理要求的時間間隔，發出進一步的臨時詳細報告，給出 索賠的累計總額及進一步提出索賠的依據。在向工程師發出臨時詳細報告情況下， 承包商應在索賠事件所産生的影響結束後28天內發出一份最終詳細報告。如工程 師要求這樣做的話，承包商應將所有根據本款送交工程師的詳細報告複印送交雇 主。 
86．2 如果承包商在尋求任何索賠時未能遵守本條款的各項規定，他有權得 到的有關付款將不超過工程師或根據第99.3款指定的任何仲裁員或幾位仲裁員通 過同期記錄核實估價的索賠總額。 
第八十六條 索賠的支付 
87.1 在工程師與雇主和承包商適當協商之後，認爲根據承包商所提供的足夠 充分的細節使工程師有可能確定出應付的金額時，承包商有權要求將工程師可能 認爲應支付給他的索賠金額納入工程師按第92條簽署的任何臨時付款。 
如承包商提供的細節不足以證實全部的索賠，則承包商應有權得到已滿足工 程師要求的那部分細節所證明的有關部分的索賠，工程師應將按本款所作的任何 決定通知承包商，並將一份副本呈交雇主。 

第十四章 承包商的設備、臨時工程和材料

第八十八條 工程專用的承包商的設備、臨時工程和材料 
88.1 由承包商提供的承包商的所有設備、臨時工程和材料，一經運至現場， 就應被視爲是專供本工程施工所用，承包商除將上述物品從現場某一部位移至另 一部位之外，未經工程師同意，不得將上述物品或其中任何一部分移出現場。但 用於運送任何職員、勞務人員、承包商的設備、臨時工程、工程設備或材料出入 工地的車輛無需經過同意。 
88.2 除第43至46條和97條所提及者外，雇主無論何時均不對任何上述承 包商的設備、臨時工程或材料的損失或損壞承擔責任。 
88.3 當承包商提出要求時，雇主應盡最大的努力協助承包商辦理工程所需的 承包商的設備、材料及其它物品的海關手續。 
88.4 對於承包商爲本工程目的而進口的任何承包商的設備，當承包商根據本 合同條款將該設備撤離時，雇主應在需要時盡其最大努力協助承包商獲得政府對 承包商設備再出口的任何必要的許可。
88.5 如果發生合同終止，爲保證能夠繼續爲工程施工使用租用的承包商設備， 承包商不得將任何租用的承包商設備帶至現場，除非有一個租用此類設備的協定， 且該協定包括如下規定：如果雇主在合同終止生效後7天內提出書面要求，以及 雇主承諾從此日起承擔上述所有設備的租金，設備所有者將上述承包商的設備以 與原來租給承包商時完全相同的條件租給雇主使用。此外，雇主還有權根據第95 條的規定，爲實施、完成及修補任何工程缺陷之目的，允許所雇用的任何其他承 包商使用這些設備。 
88.6 如果雇主按第88.5款簽訂了租用承包商設備的任何協定，雇主根據該 協定正當支付的所有款項及所有由於簽訂該協定所發生的費用，均應視爲根據第 95條實施和完成工程以及修補其任何缺陷的專用的一部分。 
88.7 在爲該工程任何部位的施工而簽訂了任何分包合同的合同方，承包商應 將本條中有關分包商帶入現場的承包商的設備、臨時工程及材料的規定編入此類 分包合同中。 
88.8 本條款的執行不意味工程師對其中所涉及的材料或其他事項的任何批准， 也不妨礙工程師在任何時候對任何上述材料的拒絕。 

第十五章 工程測量 

第八十九條 工程量 
89.1 工程量表中開列的工程量是該工程的估算工程量，它們不能作爲承包商 履行本合同義務過程中應予完成的工程的實際和確切的工程量。 
89.2 除另有規定外，工程師應按合同通過測量來核實和確定工程的價值，並 根據第92條，承包商應得到該價值的付款。當工程師要求對任何部分進行測量時， 他應及時地通知承包商授權的代理人，代理人應： 
 (a) 立即參加或派出一名合格的代表協助工程師進行上述測量；以及 
 (b) 提供工程師所要求的一切詳細資料。如承包商不參加，或由於疏忽、遺 忘而未派上述代表參加，則由工程師進行的或由其批准的測量應被視爲對工程該 部分的正確測量。對永久工程進行測量需用記錄和圖紙時，工程師應在工作過程 中準備好記錄和圖紙，而當承包商被書面要求進行該項工作時，應在14天內參加 審查，並就此類記錄、圖紙與工程師達成一致，並應在雙方一致時，在上述文件 上簽名。如果承包商不出席此類記錄和圖紙的審查和承認時，則應認爲這些記錄 和圖紙是正確無誤的。如果在審查上述記錄和圖紙之後，承包商不同意上述記錄和圖紙，或不簽字表示同意，它們仍將被認爲是正確的，除非承包商在上述審查 後14天內向工程師提出申訴，申明其認爲上述記錄與圖紙中的不正確之處。在接 到申訴通知後，工程師應復查這些記錄和圖紙，或予以確認或予以修改。 
89.3 無論通常的和當地的習慣如何，工程測量應該測量淨值，但合同另有規 定除外。 
89.4 爲按照第92.1款提交報表，承包商應在接到中標函後28天內把包含在 投標書中的第一包乾專案的分項表提交給工程師。該分項表應得到工程師的批准。 

第十六章 暫定金額

第九十條 定義和使用 
90.1 暫定金額是指包括在合同中，並在工程量表中以該名稱標明，供工程任 何部分的施工，或提供貨物、材料、設備或服務，或供不可預料事件之費用的一 項金額。這項金額按工程師的指示可能全部或部分地使用，或根本不予動用。承 包商僅有權使用按本款規定由工程師決定的與上述暫定金額有關的工作、供應或 不可預料事件的費用數額。工程師應將按本款所作的任何決定通知承包商，並向 雇主呈交一份副本。 
90.2 對於每筆暫定金額，工程師有權指示下列人員實施工作、提供貨物、材 料、設備或服務： 
（a） 承包商，據此，承包商就有權使用根據第84條所確定的與上述工作相 應價值的款額； 
（b）按下文定義的指定分包商，據此，支付給承包商的金額應按第91.4款 確定和支付。 
90.3 除那些按投標書中所列之費率或價格進行估價的工作外，承包商應向工 程師出示與暫定金額開支有關的所有報價單、發票、憑證和帳單或收據。 

第十七章 指定的分包商

第九十一條 指定的分包商 
91.1 可能已經或將由雇主或工程師指定、選定或批准的進行與合同中所列暫 定金額有關的任何工程的施工或任何貨物、材料、工程設備或服務的提供的所有 專業人員、商人、零售商及其他人員，以及根據合同規定，要求承包商進行分包的一切有關人員，在從事這些工作的實施或貨物、材料、工程設備或服務的提供 過程中，均應視爲承包商雇用的分包商，並在此合同中稱爲“指定的分包商”。 
91.2 雇主或工程師不應要求承包商或認爲承包商有任何義務去雇用承包商有 理由反對雇用的任何指定的分包商，或去雇用任何拒絕按下述規定與承包商簽訂 分包合同的指定的分包商： 
（a）有關分包合同涉及的工作、貨物、材料、工程設備或是服務的問題，指 定的分包商應對承包商承擔此類義務和責任，以使承包商可以按照此合同條款免 除他自己對雇主承擔的義務和責任；指定分包商還應在上述義務和責任方面以及 凡是由之引起的或是與此相關連的一切索賠、訴訟、損害賠償費、訴訟費、指控 費和其他費用方面，或是與任何未能履行上述義務或完成上述責任引起的或是與 此相關連的方面，保護和保障承包商；以及 
（b）指定的分包商應保護並保障承包商免於承擔由分包商、其代理人、工人 和服務人員的任何疏忽造成的損失，以及免于承擔分包商及其所屬上述人員對承 包商爲實施合同所提供的任何臨時工程的任何誤用造成的損失，以及免於承擔上 述的一切索賠。 
91.3 如果要提供與任何指定金額有關的服務，包括永久工程的任何部分或與 永久工程配套的任何工程設備的設計或規範，則此種要求應在合同中明確予以規 定，並應包括在任何指定的分包合同中，指定的分包合同應規定，提供上述服務 的指定的分包商要保護並保障承包商免於承擔由於上述事項以及任何由於指定的 分包商的違章或失職引起的和與之有關的一切仲裁索賠、訴訟、損害賠償費、訴 訟費、指控費和其他費用。 
91.4 由任何指定的分包商己實施的所有的工作或已提供的貨物、材料、工程 設備或服務，承包商有權得到。 
（a）按工程師的指示，並根據分包合同的規定，由承包商已付出或應付出的 實際金額； 
（b）由承包商提供的有關勞務費用，其金額按工程量表中所列，或者，若工 程師按第90．2（a）款規定發出指示根據第96條加以確定； 
（c）有關所有其他費用和利潤，其金額按已支付或應支付的實際價格百分率 計算；當工程量表中已對有關暫定金額比率作出規定時，則按承包商對該專案所 填寫之比率計算；或者，當未作好此項規定時，則按承包商在投標的附件中填寫 的，並在工程量表中爲此目的在某一專項中作出這種規定時加以重復填寫的比率 計算。
91.5 在根據第92條頒發任何包括關於任何指定的分包商已完成的工作或已 提供的貨物、材料、工程設備或服務的任何支付證書之前，工程師應有權要求承 包商提供合理的證明，證明以前的證書包括的該指定分包商的有關工作、貨物、材 料、工程設備或服務的所有費用均已由承包商支付或償清。如果承包商未提供上 述證明，除非承包商： 
（a）以書面材料使工程師同意他有正當的理由扣留或拒絕付給該項款額；並 
（b）向工程師遞交合理證明，證明他已將上述情況以書面形式通知了該指定 的分包商。 
則雇主有權根據工程師的證明直接向該指定分包商支付在指定分包合同中已 規定的，而承包商未曾向該指定的分包商支付的一切費用，並以沖帳方式從雇主 應付給或將付給承包商的任何款項中將雇主支付的上述金額扣除。 
在工程師已發給證明，且雇主已如上述規定直接付款的情況下，工程師在頒 發以承包商爲受款人的進一步的證書時，應從付款額中扣除上述直接支付的款額， 但不應拒發或拖延按合同應該發出的證書。 

第十八章 發出證書與支付

第九十二條 報表與支付 
92.1 承包商應在每個月末按工程師可隨時指定的格式向工程師提交一式6份 報表，每份均應由工程師按第37.1一2款規定批准的承包商代表簽字，報表應說 明承包商認爲自己有權到月底得到涉及以下方面的款項： 
 (a) 已實施的永久工程的價值； 
 (b) 工程量表中的任何其他專案，包括承包商的設備、臨時工程、計日工及 類似專案； 
(c) 表列材料及承包商在工地交付的準備爲永久工程配套而尚未裝到該工程 之中的工程設備的發票價值的百分比，如投標書中所注明的； 
(d) 按第102、103條進行的調整； 
(e) 按合同規定承包商有權得到的任何其他金額。 
92.2 工程師應在接到上述報表28天內向雇主證明其認爲到期應支付給承包 商的有關付款金額，但應： 
（a）保留按投標書附件注明的保留金百分率乘以承包商根據第92．1款（a）、 （b）、（c）和（e）項有權得到的款額而計算出的保留金額直至該保留的款額達到投標書附件中規定的保留金限額爲止；以及 
（b）扣除第80條規定之外的承包商到期應付給雇主的任何金額。 
但是，如果在各次保留與扣除金額之後的淨額少於投標書附件中規定的臨時 支付證書的最小限額時，工程師沒有義務按本款開具任何支付證書。儘管有本條 款或任何其他合同條款的規定，在承包商提交履約保證，並經雇主批准之前，工 程師將不對任何支付款額開具證書。 
92.3 （a）當頒發整個工程的移交證書之時，工程師應爲把一半保留金付給 承包商開具證書，或是在頒發永久工程的一區段或部分的移交證書時，工程師應 爲把由他決定的與永久工程的這一區段或部分的價值相應的保留金付給承包商開 具證書； 
（b）當工程的缺陷責任期滿時，另一半保留金將由工程師開具證書付給承包 商。但根據第81條若有不同的缺陷責任期適用于永久工程的不同區段或部分時， 缺陷責任期滿這一措詞在本款中應被認爲指上述缺陷責任期中最後一個責任期的 屆滿。但如果在此時根據第82條，對整個工程來說還有已下達的應由承包商完成 的與工程有關的任何工作時，工程師有權在剩餘工程完成之前扣發工程師認爲與 需要完成的工程費用相應的保留金餘款的支付證書。 
92.4 工程師可通過任何臨時證書對他所簽發過的任何原有的證書進行任何修 正或更改，如果他對任何工作執行情況不滿意，他有權在任何臨時證書中刪去或 減少該工作的價值。 
92.5 頒發有關整個工程的移交證書之後84天內，承包商應向工程師呈交一 份竣工報表，該報表應附有按工程師批准的格式編寫的證明文件，詳細地說明以 下內容： 
（a）到該移交證書注明的日期爲止，根據合同所完成的所有工作的最終價 值； 
（b）承包商根據合同認爲應支付給他的，任何進一步的款項；以及 
（c）承包商認爲根據合同將支付給他的估算數額。 
估算的數額應在此竣工報表中單獨列出。工程師應根據第92.2款開具支付證 書。 
92.6 根據第94.1款在頒發缺陷責任證書後的56天之內，承包商應向工程師 提交一份最終報表草案供工程師考慮，該草案應附有按工程師批准的格式編寫的 證明文件，詳細地說明以下內容： 
（a）根據合同所完成的所有工作的價值；以及（b）承包商根據合同認爲應支付給他的任何進一步的款項。 
如果工程師不同意或是不能證實該最終報表草案的任何一部分，則承包商應 根據工程師的合理要求提交進一步的資料，並對草案進行修改以使雙方可能達成 一致。隨後，承包商應編制並向工程師提交雙方同意的最終報表。 
92.7 在提交最終報表時，承包商應給雇主一份書面結算清單，進一步證實最 終報表中的總額，相當於由合同引起的或與合同有關的全部和最後確定應支付給 承包商的所有金額，並將一份副本呈交工程師。但該清單只是在根據第104.8款頒 發的最終證書規定的應支付的款項支付之後，以及第27.1款提及的履約保證書退 還給承包商之後才能生效。 
92.8 在接到最終報表及書面結算清單後28天內，工程師應向雇主發出一份 最終證書，並將一份副本交承包商，說明： 
（a） 工程師認爲按照合同最終應支付的款額； 
（b） 在對雇主以前支付的所有款額和根據合同雇主有權得到的全部金額加 以確認後，雇主還應支付給承包商，或者承包商還應支付給雇主的餘額。 
92.9 除非承包商在其最終報表中以及在第92.5款提及的竣工報表中已經包 括索賠事宜，對由合同及工程實施引起的或與之有關的任何問題和事件，雇主不 應對承包商負有責任。 
92.10 在工程師按本條款或合同的任何其他條款頒發的任何臨時證書中規定 的應支付給承包商的款額，在該臨時證書被送交雇主後28天內，或在第92.8款提 及的最終證書送交雇主後56天內，由雇主支付給承包商，但應受第80條的約束。 如果雇主未能在規定的時間內支付，則雇主應按投標書附件中規定的利率，從應 付之日起計向承包商支付全部未付款額的利息。本款之規定不損害承包商根據第 101條應享有的權利。 
第九十三條 僅憑缺陷責任證書的批准 
93.1 只有第94條規定的缺陷責任證書能被視爲構成對工程的批准。 
第九十四條 缺陷責任證書 
94.1在工程師頒發缺陷責任證書並送交雇主，同時將一份副本送交承包商， 申明承包商已盡其義務完成其施工和竣工，並修補其中缺陷，達到使工程師滿意 的日期之前，不應認爲該合同已經結束。缺陷責任證書應由工程師在缺陷責任期 終止後28天內頒發，或者，如果不同的缺陷責任期適用于永久工程的不同區段或 部分時，則在最後一個缺陷責任期終止或根據第82條，在任何被指標進行的工程已完成並達到工程師滿意之後儘快簽發。但頒發缺陷責任證書不應作爲將92．3 款規定的第二部分保留金支付給承包商的先決條件。 
94.2 儘管頒發了缺陷責任證書，但承包商和雇主仍應對在缺陷責任證書頒發 時尚未履行的義務承擔責任。爲了確定任何此類義務的性質和範圍，合同應被認 爲對合同雙方仍然有效。 

第十九章 補救

第九十五條 承包商的違約 
95.1 如果承包商依法被判定不能償付其到期應付的債務，或者自動或者非自 動宣告破産、停業清理或解體，或已失去償付能力，或與其債權人作出安排，或 作出對債權人的轉讓，或同意在其債權人的監督委員會監督之下執行合同，或者 如果由一個破産案産業管理人、遺産管理人、財産受託管理人或資産清算人被指 定監督其財産的任何實質部分，或是如果根據與債務的重新組合、安排或重新調 整有關的任何法律或法規，開始對承包商起訴或通過與解體或清償有關的決議， 或是如果採取任何步驟控制承包商資産主要部分的抵押權益，或是如果對承包商 或其財産採取的任何行動或發生的任何事件，根據任何適用的法律，具有與前述 的行動或事件實際上相似的效果，或是如果承包商已違反了第12.1款，或其貨物 被扣押，或是如果工程師向雇主說明，並將一份副本送交承包商，他認爲承包商： 
（a）已否認合同有效；或 
（b）無正當理由而未能按第74.1款開工，或按第79.1款收到通知後28天內 繼續進行工程或工程之任何區段的施工；或 
（c）未能在收到通知和指示後28天內履行按第72.4款頒發的通知或按第72． 8款頒發的指示；或 
（d）無視工程師事先的書面警告，反而固執地或公然忽視履行合同所規定的 義務；或 
（e）已違反第13.1款。 
則雇主在向承包商發出通知14天後，可以進駐現場和工程，並在不解除承包 商按合同規定的任何義務與責任或影響合同賦予雇主或工程師的各種權利和許可權 的情況下，終止其對承包商的雇用。雇主可自己完成該工程，或雇用其他任何承 包商去完成該工程，雇主或其他上述承包商在他或他們認爲合適時，爲完成該工 程可使用他們認爲合適的那部分承包商的設備、臨時工程和材料。95.2 在雇主進行任何此類進駐和終止後，工程師應儘快單方面地或通過與 各方協商後，或在他認爲適宜進行或實施調查或查詢之後，確認和決定，並應證 明： 
（a）在上述進駐與終止合同之時，承包商就其按合同規定實際完成的工作， 已經合理地得到或理應收入的款額；以及 
（b）上述未曾使用或部分使用了的任何材料，任何承包商的設備及任何臨時 工程的價值。 
95.3 如果雇主按本條規定終止對承包商的雇用，則在缺陷責任期滿以前及以 後，在工程師查清施工、竣工及修補任何缺陷的費用，竣工拖延的損害賠償費以 及由雇主支付的所有其他費用，並對上述款額開具證書以前，雇主沒有義務向承 包商支付合同規定的任何進一步的款項。此後，承包商僅有權得到由工程師證明 承包商合格完工時本應支付給他的並扣除上述款項後的此類款額。如果該項款額 超過承包商合格完工時本應支付給他的款額，則根據要求，承包商應將此超出部 分付給雇主。並應視爲承包商欠雇主而應付的債務。 
95.4 在第107.1款中所述的此類進駐與終止後14天內，如果工程師發出指示 並且法律允許，承包商應將其爲該合同目的可能簽訂的，有關提供任何貨物或材 料或服務或有關實施任何工作的協定的權益轉讓給雇主。 
第九十六條 緊急補救工作 
96.1 無論在工程施工期間還是在缺陷責任期間，如果工程或其任何部分本 身，或在工程中或在工程的任何部分中發生或發生與之有關的任何事故，故意或 其他事件，工程師認爲進行任何補救或其他工作是工程安全的緊急需要，而承包 商無能力或不願立即進行此類工作時，則雇主有權在工程師認爲必要時雇用其他 人員去從事該項工作並支付有關費用。如果工程師認爲由雇主如此完成的工作或 修理是按合同應由承包商負責以自費進行者，則所有隨之産生或與之有關的費用， 在同雇主和承包商適當協商後，將由工程師確定並且應由雇主向承包商索回，並 可由雇主從應支付或將支付給承包商的款項中扣除，工程師應相應地通知承包商， 並將一份副本呈交雇主。但在任何此類緊急事件發生後，工程師在實際可行的情 況下，應儘快將之通知承包商。 

第二十章 特殊風險

第九十七條 對特殊風險不承擔責任 
97.1 承包商對第97.2款所提到的任何特殊風險造成的有關下列後果，均不 負賠償或其他責任： 
（a）在上述任何特殊風險發生之前按第72.8和72.9條規定被宣告爲不合格 工程之外的本項工程的破壞或損壞；或 
（b）雇主或第三方財産受到破壞或損害；或 
（c）人身的傷亡。 
97.2 特殊風險系指： 
（a）第46.1款的（a）、（c）、（d）、（e）段定義之風險，以及 
（b）第46.1款（b）段所定義的、在工程施工所在國的有關風險。 
97.3 如果由於上述特殊風險致使工程或在現場或現場附近，或運往現場的任 何材料或工程設備，或任何承包商的設備，遭到毀壞或損害時，則承包商根據合 同有權得到對任何已按時完成的永久工程以及任何受到毀壞與損害的材料或工程 設備的付款，還有權得到根據工程師的要求所進行的，或爲了完成工程所必須進 行的以下工作的付款： 
（a）修復任何此類被破壞或損害的工程；以及 
（b）替換或修復此類材料或承包商設備。 
工程師應根據第84條規定確定追加合同價格並相應地通知承包商，同時將一 份副本呈交雇主。 
97.4 無論何時何地發生任何因地雷、炸彈、爆破筒、手榴彈或是其他炮彈、 導彈、彈藥或戰爭用爆炸物爆炸或衝擊引起的破壞、損害、人身傷亡，均應視爲 上述特殊風險的後果。 
97.5 除了按合同中任何其他條款規定承包商有權得到付款外，雇主應償還承 包商任何施工費用，此費用不管是歸因於上述特殊風險，或隨其發生，或爲其結 果，或以任何方式與之有關，但受本條款下文所包含的與戰爭爆發有關規定的額， 並加到合同價格中去，同時通知承包商，並將一份副本呈交雇主。 
97.6 在合同執行過程中，如果在世界任何地區爆發戰爭，無論宣戰與否，也 不論其在財務上或其他方面實際上對工程施工有無影響，承包商應繼續盡最大努 力完成施工，除非和直到合同根據本條款規定被終止。但在上述戰爭爆發後的任 何時候，雇主應有權通知承包商終止合同，一經發出此項通知，除執行本條規定 的各方權利和執行第99條的規定外，此合同應告終止，但不影響雙方中任一方對 於任何先前的違約所享有的權利。
97.7 如果根據第97.6款規定合同被終止，承包商應盡速從現場撤離其全部 設備，並應爲他的分包商提供相同的方便撤離其設備。 
97.8 如果合同如前所述被終止，則雇主應按合同中規定的費率和價格向承包 商支付在合同終止日期以前完成的全部工作的費用，但應減去帳上已支付給承包 商的款項與專案，並另外支付下述費用： 
（a）有關工程量表中提及的任何開辦專案的應支付款額，只要這些專案中的 工作或服務已進行或履行，以及任何上述專案中已進行或履行了的相應部分工作 或服務的費用； 
（b）爲該工程所合理訂購的材料、工程設備或貨物的費用，如已將其交付給 承包商或承包商對之依法有責任收貨時，則雇主一經支付此項費用，該項材料、工 程設備或貨物即成爲雇主的財産； 
（c）承包商爲完成整個工程所合理發生的任何開支的總計，而該項開支未包 括在本款提及的任何其他付款中） 
（d）按第97.3和97.5款規定的應支付的任何附加金額； 
（e）考慮到爲工程施工已支付或將支付的費用，和按照第97.7款撤離承包商 設備的費用，以及在承包商提出要求時，將承包商的設備運回其註冊國內承包商 的設備基地或其他目的地的費用的合理部分，但不得多索費用； 
（f）承包商雇用的所有從事工程施工及與工程有關的職員和工人在合同終止 時的合理遣返費。 
但雇主除按本款規定應支付任何費用外，亦應有權要求承包商償還任何有關 承包商的設備、材料和工程設備的預付款的未結算餘額，以及在合同終止之日，按 合同規定應由承包商償還雇主的任何其他金額。任何按本款規定應支付的金額應 由工程師在同雇主和承包商適當協商後確定，並應相應地通知承包商，同時將一 份副本呈交雇主。 

第二十一章 解除履行合同

第九十八條 解除合同時的付款 
98.1 如果在頒發中標函後發生雙方無法控制的任何情況，使雙方中任何一方 不可能或是不能依法履行自己在合同中的義務，或根據合同法雙方均被解除繼續 履約時，如果合同已按第97條的規定被終止，則雇主爲已實施的工程向承包商支 付的金額應與按第97條規定應支付的金額相等。

第二十二章 爭議的解決

第九十九條 爭議的解決 
99.1 如果在雇主和承包商之間由於或起因于合同或工程施工而産生任何爭議， 包括對工程師的任何意見、指示、決定、證書或價值方面的任何爭議，無論是在 工程施工中還是竣工後，也不論是在否認合同有效或合同在其他情況下終止之前 還是之後，此類爭議事宜應首先以書面形式提交工程師，並將一份副本提交另一 方，同時應說明向工程師提交這種文件是根據本條款採取的行動。工程師應在收 到上述文件後84天之內將其決定通知雇主和承包商，該決定亦應說明是根據本款 作出的。 
除非合同已被否認或被終止，在任何情況下，承包商都應以應有的精心繼續 進行工程施工，而且承包商和雇主應立即執行工程師作出的每一項此類決定，除 非並直至該決定按下述規定變爲友好解決或仲裁裁決。 
如果雇主或承包商雙方中的任何一方對工程師的任何決定不滿意，或者如果 工程師未能在他接到該文件後的第84天或此前將其所作決定的通知發出，那�活A 無論雇主或是承包商都可以在收到此決定的通知後的第70天或此前，或在上述84 天期滿之後的第70天或此前，按下列規定將其把有關爭議提交仲裁的意向通知另 一方，並將一份副本交工程師參考。這一通知就確定了發出通知一方就此爭端按 以下規定開始仲裁的權利。按照第99.4款的規定，如果沒有發出此類通知，上述 仲裁則不能開始。 
如工程師已將他對爭端所作的決定通知了雇主和承包商，而雇主和承包商雙 方收到工程師有關此決定的通知後第70天或在此之前均未發出要將該爭議提交仲 裁的通知，則上述決定將被視爲最後決定並對雇主和承包商雙方均有約束力。 
99.2 按第99.1款規定已經發出將把一件爭議提交仲裁的通知後，爭執雙方 應首先設法友好解決爭議，否則不應對這一爭議開始仲裁。如果爭議雙方沒有另 外的協定，仲裁可在將此爭議提交仲裁的意向通知發出後第56天或此後開始，而 不論是否已作過友好協商的嘗試。 
99.3 有關以下方面的任何爭議： 
 (a) 工程師的決定，未能根據第99.1款規定成爲最終決定並具有約束力，以 及 
 (b) 在第99.2款規定的期限內尚未達成友好解決。
除非合同中另有規定，均應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會深圳分會進行 仲裁，由其按其仲裁規則組成仲裁庭予以最終裁決。上述仲裁庭有全權解釋、複 查和修改工程師對爭議所作之任何決定、意見、指示、確定、證書或估價。 
雙方中任何一方在仲裁程式中，均不受根據第111.1款爲取得工程師的上述決 定而向工程師提供證據或論據的限制。上述工程師的決定，不應使他失去被傳爲 證人以及向仲裁庭提供任何與爭議有關的證據的資格。 
在工程竣工之前或之後均可訴諸仲裁，但在工程進行過程中，雇主、工程師 及承包商各自的義務不得以仲裁正在進行爲理由而加以改變。 
99.4 當雇主和承包商雙方都未在第99.1款規定的期限內發出將爭議提交仲 裁的意向通知，而有關決定成爲最終決定並具有約束力時，如果一方未能遵從此 決定，則另一方在不損害任何其他具有的權利情況下，可根據第99.3款的規定將 此未履約行爲提交仲裁。第99.1和99.2款的各項規定不適用於任何此類提交。 

第二十三章 通知

第一OO條 通知
100.1 根據合同條款由雇主或工程師發給承包商的所有證明，通知或指示均 應通過郵件、電報、電傳或傳真發至或留在承包商主要營業地點或承包商爲此目 的指定的其他該類地址。 
100.2 根據合同條款發給雇主或工程師的任何通知均應通過郵件、電報、電 傳或傳真發至或留在爲此目的指定的各有關地址。 
100.3 合同雙方的任何一方均可在事先通知另一方，將指定地址改變爲工程 施工所在國內的另一地址，並將一份副本送交工程師，工程師也可在事先通知合 同雙方後這樣做。 

第二十四章 雇主的違約

第一O一條雇主的違約 
101.1 如果雇主發生以下事件時： 
 (a) 在第92.10款中規定的應付款時間期滿後28天內，未能按工程師的任何 證書向承包商支付應付的款額；或 
 (b) 干涉、阻撓或拒絕爲頒發任何上述證書所需要的批准；或(c) 破産，或作爲一家公司宣告停業清理，但此清理不是出於重建或合併計 劃的目的；或 
 (d) 通知承包商，由於不可預見的原因，由於經濟混亂，使他不可能繼續履 行其合同義務。 
則承包商在通知雇主，並將一份副本呈交工程師的情況下，有權根據合同終 止其受雇。這一終止在發出通知後14天生效。 
101.2 在第101.1款所規定的14天通知期滿之時，承包商除不受第88.1款的 約束，應儘快從現場撤離所有其帶至工地的設備。 
101.3 如果發生上述終止，雇主在付款方面對承包商承擔的義務與第97條規 定的如果合同終止時所應承擔的義務相同。但是除了第97.8款所規定的付款之外， 雇主還應支付承包商由於該終止引起的或與之有關的或由其後果造成的任何對承 包商的損失或損害所發生的金額。 
101.4 在不影響承包商根據第92.10款享有利息和根據第113.1款終止合同的 權利的情況下，在雇主有根據合同進行任何 扣除時，如雇主在第104.10款規定的應付款時間期滿後28天內，未能按工程師的任何證書向承包商支付應付的款 額，承包商可在提前28天通知雇主並將一份副本呈交工程師的情況下，暫停工作 或減緩工作速度。 
如承包商根據本款規定暫停工作或減緩工作速度並由之造成延誤或招致費用， 工程師應在與雇主和承包商協商之後決定： 
（a）根據第77條規定，承包商有權獲得任何延長的工期；以及 
（b）應在合同價格中增加此類費用總額。 
並相應地通知承包商，將一份副本呈交雇主。 
101.5 當承包商根據第101.4款發出通知，暫停工作或減緩工作速度，而 雇主隨即支付了包括第92.10款規定的利息在內的應付款項，如尚未發出終止通 知，則承包商根據第113.1款所享有的權利即告失效，並且承包商應儘快恢復正常 施工。 

第二十五章 費用和法規的變更

第一O二條 費用的增加或減少 
102.1 合同價格的調整應根據當地勞務價格及本款所列材料費用的漲落予以 調整：（a）當地工人 
（1）就本款而言： 
 “當地工人”系指承包商爲合同或與合同有關之目的的雇用的在現場從事各 種工作的熟練、半熟練及不熟練工人，或承包商爲合同或與合同有關之目的雇用 的現場外全日制工作的熟練、半熟練或不熟練工人。 
 “基本工資率”系指在提交投標書截止日以前28天的當日，根據政府或地方 的任何法規、法令、政令或其他法律或任何規章，或任何地方的或其他合法機構 制定的細則所通行的適用的最低基本工資率，或一般在工程準備實施地區與較好 的雇主中的做法相一致的適用的最低基本工資率。 
 “現行工資率”系指規定提交投標書截止日以前28天之後的任何日期，根據 政府的任何法規、法令、政令或其他法律或 
任何規章，或任何地方的或其他合法機構制定的細則所通行的適合於當地工 人的最低基本工資率。 
（II）根據本款條件所作的合同價格調整應以當地工人基本工資率與現行工 資率的差值乘以下列數位計算得出： 
實際工作總小時數，以及 
在涉及以加班工資率工作的小時數時，則以此加班小時數與承包商依法應付 的加班工資增補百分數相乘的積。此類調整也許是對合同價格的增加，也許是對 合同價格的減少。 
（III）合同價格不應因當地工人的報酬的波動而作調整。 
（b）所列材料 
（1）就本款而言： 
“所列材料”系指投標書附件（填入編號）中規定的在現場施工並完成工程 所需的材料。 
 “基本價格”系指在遞交投標書截止日期以前28天當日通行的所列材料的現 行價格。 
 “現行價格”系指遞交投標書截止日以前28天之後的任何日期通行的所列材 料的現行價格。 
（II）根據本款規定所作的合同價格的調整應通過把“基本價格”與“現行 價格”的差值乘以在特定現行價格有效期間內發送到現場的所列材料的數量計算 得出。上述調整也許是對合同價格的增加，也許是對合同價格的減少。 
（III）承包商應盡其勤勉之職，確保不發生所列材料過於浪費的現象。任何運出現場的所列材料都應在本款（b）項要求的記錄中予以清楚地驗明。 
（IV）本款各項規定適用於爲施工目的在現場使用的承包商設備所用的燃料， 上述設備包括承包商擁有的，用於運送職員、工人、承包商設備、臨時工程、工 程設備或材料進出工地的車輛。上述燃料應在本款（d）項要求的記錄中清楚地驗 明。本款的規定不適用於任何賣給或供給承包商的雇員或其他任何與本合同無關 的個人用車所需的燃料。 
（V）承包商應自始至終注意適合的市場。購買材料時，每當材料費用的變 動可能引起本款規定的合同價格的調整時，承包商應盡其勤勉之職，以與恰當地 履行合同規定之義務相一致的態度，以最便宜的價格購進上述材料。如果任何時 候出現承包商一方不夠勤勉、違約或玩忽職守的情況，無論是在遵守上述要求時， 還是其他情況下，在調整合同價格時，對因上述不勤勉、違約及玩忽職守所造成 的費用的增加將不予考慮；對本來可以降低的費用，但由於不勤勉、違約或玩忽 職守而未能降低時，此筆金額應從合同價格中扣除。 
（VI）合同價格不應因材料費用的波動而作調整。 
（c）不包括企業管理費和利潤 
在根據本款確定合同價格調整額時，不考慮任何企業管理費用和利潤。 
（d）通知與記錄 
當發生可以或可能導致本款所說的合同價格調整之任何事件時，承包商應立 即向工程師就此發出通知，承包商還應保存爲使合同價格得以按本款規定進行調 整所必需的帳薄、帳單及其它文件和記錄，並在工程師提出要求時，提供出示任 何所保存的發票、帳單、文件或記錄，以及工程師可能要求的其他資訊。 
（e）竣工日以後的調整 
在根據第43條證明的全部工程應竣工的日期以後，或根據第48條證明的全 部工程竣工日之後，合同價格應按應竣工日或移交證書中規定之日的現行費率或 現行價格（如果合適的話）進行調整，兩個日期中取較早者。 
（f）合同價格調整的確定 
根據本款對任何合同價格進行調整之款額應由工程師根據上述各項規則確定。 
第一O三條 後繼的法規 
103.1 如果在呈遞合同投標截止日期前的28天以後，在工程施工或預計施 工的所在國中，國家或地方的任何法規、法令、政令或其他法律或規章，或任何地方或其他合法機構的細則發生了變更，或任何上述地方的法規、法令、政令、法 律、規章或細則等的採用，使得承包商在實施合同中發生了除第102.1款規定以外 的專用的增加或減少此類增加或減少的費用應由工程師與雇主和承包商協商之後 確定，並加入合同價格或從中扣除，工程師應相應地通知承包商，並將一份副本 呈交雇主。 

第二十六章 貨幣及匯率

第一O四條 貨幣限制 
104.1 在呈遞合同投標書截止日期前的28天以後，如果工程施工或預定施工 的所在國政府或該政府的授權機構對支付合同價格的一種或幾種貨幣實行貨幣限 制以及匯兌限制，則雇主應賠償承包商因此而受到的損失或損害，且不影響承包 商行使其在此類事件中有權行使的任何其他權利或採取補救措施。 
第一O五條 匯率 
105.1 如果合同規定將全部或部分款額以一種或幾種外幣支付給承包商，是 此項支付不應受上述指定的一種或幾種外幣與工程施工所在國貨幣之後的匯率變 化的影響。 
105.2 如果雇主已要求投標書以單一貨幣報價，但用一種以上的貨幣支付，且 承包商也已聲明他要求支付的另一種或幾種貨幣的比例或款額，則適用於計算該 比例或款額的一種或多種匯率，除非在本合同中另有規定，應爲在合同投標書遞 交截止日期前28天的當日，由預定工程施工所在國中央銀行決定的通行匯率，並 由雇主在標書遞交之前通知承包商，或在標書中予以規定。 
105.3 如果合同規定以一種以上的貨幣進行支付，當暫定金額按第90和91條 規定全部或部分使用時，用以支付暫定金額的外幣比例或數額按第105.l和105.2 款所規定的原則確定。 

第二十七章 合同生效

第一O六條 合同生效 
106.1 本合同在下列條件滿足之日起生效；
     (a) 雙方授權代表簽字，
（b）並經雙方政府批准。 
106.2 雙方應在合同簽字之日起兩個月內完成上述批准手續。 
106.3 在106.1款規定的條件滿足後，雙方應通過信件確認合同生效日期。 
106.4 本合同的效力直至雙方所有的責任和義務完成時爲止。