成套設備進口合同(CIF條件)

目 錄 
第一章 定 義 
第二章	合同範圍 
第三章	價 格 
第四章	支 付 
第五章	交貨與保險 
第六章	包裝與標記 
第七章	技術文件 
第八章	設計與設計聯絡 
第九章	標準與檢驗 
第十章 安裝、試車、投料試生産、性能測試和驗收 
第十一章	保證與擔保 
第十二章	改進與回授 
第十三章	保 密 
第十四章 索 賠 
第十五章	解除合同 
第十六章 不可抗力 
第十七章 稅 費 
第十八章 仲 裁 
第十九章 合同的生效及其他 

附 件 
附件一： 賣方供應範圍內的合同設備清單 
附件二： 專利和/或專有技術範圍和有關的技術資料交付時間表（略） 
附件三： 合同設備、合同專案和合同産品的規格、性能、保證數值（略） 
附件四： 技術服務範圍和賣方技術人員的待遇條件 
附件五： 技術培訓範圍和買方技術人員的待遇條件 
附件六： 合同設備的交付時間表（略） 
附件七： 合同設備各分項的價格表（略） 
附件八： 設計聯絡的安排和設計包裝的交付（略） 
附件九： 設計標準和規則（略） 
附件十： 安裝、試車、投料試生産、性能測試和驗收的安排（略） 
附件十一： 賣方開立的關於預付款的不可撤銷的保證函（格式） 
附件十二： 買方開立的不可撤銷的保證函（格式） 

成套設備進口合同(CIF條件)

本合同編號爲：______________________ 
本合同簽字日期爲：__________________ 
本合同簽訂地點爲：__________________ 

中國____________公司（根據中華人民共和國法律成立註冊的公司，以下簡稱買 方）爲一方,與________公司（根據______國法律成立註冊的公司，以下簡稱賣方）爲 另一方，雙方通過友好協商同意就下列條款簽訂本合同。 

第一章 定 義 
除雙方當事人另有明確的書面約定外，下列術語具有所指明的含義： 
1.1 合同設備：賣方所提供的本合同附件一和附件三規定的用以生産合同産 品的設備、材料、零部件或備件。 
1.2 合同專案：賣方所提供的本合同附件三規定的用以生産合同産品的技術 和設備以及買方提供的與這些技術和設備相配套的輔助設施。 
1.3 合同産品：本合同專案生産的具有本合同附件三規定的規格、性能、技 術指標的産品。 
1.4 合同價格：買方因賣方全部且適當履行合同義務而支付的本合同附件七 規定的總價。 
1.5 合同幣種：用以支付本合同價款的貨幣，即_________________。 
1.6 買賣雙方銀行：買方銀行爲_________；賣方銀行爲__________。 
1.7 安裝：本合同附件十規定的合同專案全部設備的裝配、就位和連接等組 裝工作。 
1.8 試車安裝之後設備的單獨或聯動的試運轉以檢測合同設備的機械性能。詳 見合同附件十。 
1.9 投料試生産：本合同附件十規定的合同專案連接公用設施和投入原料以試製合同産品。 
1.10 性能測試: 檢測本合同附件三所規定的各項保證數值，包括設備的各項性能和産品的技術指標。 
1.11 驗收：如果考核結果表明，合同專案能夠全部達到本合同附件所規定的 各項保證指標，則視爲買方所驗收。 
1.12 裝卸港口：裝運港爲__________；卸貨港爲_________。 
1.13 目的地機場：__________。 
1.14 工作現場：執行合同專案的場所，即__________（地點）。 
1.15 現場代表: 合同雙方各自任命的在工作現場代表己方全權處理與合同義務有關的一切事務的人員。 
1.16 技術文件：本合同附件二、三、八、九中所列的與合同專案的設計、檢 驗、安裝、試車、投料試生産、性能測試、操作、維修等	有關的全部技術數 據、規格、圖紙和文件。 
1.17 技術服務：賣方根據本合同附件四的規定，就合同專案的設計、安裝、 試車、投料試生産、性能測試、操作、維修等工作，向買方提供的技術指導、協 助和監督。 
1.18 技術培訓：賣方根據本合同附件五的規定，就合同專案的設計、安裝、 試車、投料試生産、性能測試、操作、維修等工作，向買方提供的技術上的培訓。 
1.19 檢驗機構: 中華人民共和國出入境檢驗檢疫局設立在卸貨港和/或工作 現場的或鄰近的分支機搆。 
1.20 保證期：始于合同專案驗收通過之日，在此期間，賣方保證合同專案的 正常、穩定運行，並對出現的任何缺陷予以排除。詳見本合同附件三規定。 
1.21 合同生效日: 本合同經雙方當事人各自國家的審批機關批准之日起正式生效。 

第二章 合同範圍 
2.1 買方同意從賣方購買，賣方同意向買方出售______________（合同專案）， 其中包括爲保證合同專案所需要的合同設備、許可的專利和/或專有技術、合同 專案的設計、技術文件、技術服務和技術培訓，詳見本合同附件一、二、四、五、 八、九。 
2.2 賣方所供應的合同設備見附件一，合同設備的規格、性能和保證指數見附件三。 

2.3 賣方同意授權買方以獨佔性的/非獨占性的，可轉讓的/不可轉讓的權 利，在中華人民共和國內使用__________專利和/或專有技術進行合同産品的生 産和銷售，合同産品還可輸往___________，詳見合同附件二。 
賣方不得阻止買方在本合同到期後繼續使用該專利和/或專有技術。 
2.4 賣方應承擔本合同專案的設計工作，詳見本合同附件八。 
2.5 賣方應依據本合同附件二、三、八和九的規定向買方提交技術文件。 
2.6 賣方應依據本合同附件四的規定派遣有經驗的、健康的和稱職的技術人 員到工作現場提供技術服務。 
2.7 賣方應向買方的技術人員提供技術培訓，培訓人數、地點和範圍等詳見 本合同附件五。 
2.8 在本合同專案驗收後年內，根據買方的要求，賣方應以優惠的價格向買 方提供爲本合同專案正常運行所需的備品備件。屆時雙方將另簽協定。 

第三章 價 格 
3.1 賣方按本合同規定提供合同設備、許可的專利和/或專有技術、設計、技 術文件、技術服務和技術培訓等總價________________________________： （大寫：_____________________________________________.) 
3.2 合同專案的分項價格如下: 
3.2.1 合同設備價格： 
A．主設備價格： 
B．備品和備件價格： 
C．材料價格： 
D．保險和運輸費用： 
3.2.2 許可的專利和/或專有技術以及相關的技術文件費用： 
3.2.3 設計和相關的技術文件費用： 
A． 合同設備的設計費用和相關的技術文件費用： 
B．許可的專利和/或專有技術的設計費用和相關的技術文件費用: 
3.2.4 技術服務費用： 
A．合同設備的技術服務費用： 
B．許可的專利和/專有技術的技術服務費用： 
3.2.5 技術培訓費用： 
A．與合同設備相關的技術培訓費用： 
B．與許可的專利和/或專有技術相關的技術培訓費用： 
3.3 上述第3.1條所規定的合同總價爲固定的、確定的價格。 
3.4 上述第3.2.4條規定的技術服務費用爲本合同履行所必要的技術服務的最 高限價。如果實際履行的技術服務被高估了，買方可根據實際履行的情況向賣方 支付費用。 
3.5 上述第3.2.1條規定的合同設備價格爲CIF（班輪）條件下的卸貨港交付 價格，第3.2.2條和第3.2.3條規定的技術文件費用爲DDU條件下的目的地機場交 付價格。 
3.6 本合同專案的詳細價格清單詳見本合同附件七。 

第四章 支 付 
4.1 本合同買賣雙方的支付均以本合同貨幣通過買賣雙方銀行進行。 
4.2 買方以下列方式進行支付： 

方案一： 
買方在收到賣方提交的下列單據後，分期分批地將合同總價，以電匯（T/T） 方式支付給賣方。 

方案二： 
買方在收到賣方提交的下列單據後，分期分批地將合同總價，以付款交單 （D/P）或承兌後交單(D/A)的方式支付給賣方。 

方案三： 
除了預付款和技術服務費外，合同總價以不可撤銷的信用證（L/C方式支付。 預付款和技術服務費以付款交單（D/P）的方式支付。買方在本合同生效之日____ 天內出具以賣方爲受益人、金額爲上述金額的不可撤銷信用證。信用證有效期至 ____________。 
4.2.1 預付款 
買方在收到賣方提交的下列單據經審核無誤後__________ 天內，將本合同第3.2.1，3.2.2，3.2.3,和3.2.5條所規定費用的百分之 ________（_______%），即____________________. (大寫：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿____＿)，支付給賣方。 
A.賣方和/或生産商國家有關當局出具的有效出口許可證，或有關 當局或機構出具的不需出口許可證的證明文件，正、副本各一份； 
B.賣方銀行出具的以買方爲受益人、金額爲______________（大 寫: ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_）、不可撤銷的保函正、副本各一份（保證函格式見 合同附件十一。） 
C.金額爲合同總價的形式發票一式五份； 
D.簽發的商業發票一式五份；（發票注明支付金額，許可的專利和/或專 有技術費用部分）； 
E.即期匯票一式二份。 
4.2.2 許可的專利和/或專有技術、設計、技術培訓和技術文件費用的支付。 
4.2.2.1 買方在收到賣方提交的下列單據經審核無誤後__________ 天內，憑賣方基本的設計圖，將本合同3.2.2，3.2.3和3.2.5條所規定的許可的專利和/或 專有技術、設計、技術培訓和技術文件費用的百分之(__________ %），即_________________________.（大寫: ______________________________________），支付給賣方。 
A. 注明運費已付的空運提單正本一份，副本三份，或交郵的基本設計圖 航郵挂號收據； 
B．簽發的商業發票一式五份；（發票注明支付金額，許可的專利和/或專 有技術費用部分）； 
C．即期匯票一式二份。 
4.2.2.2 買方在收到賣方提交的下列單據經審核無誤後________天內，憑賣 方詳細的設計圖，將本合同3．2．2，3．2．3和3．2．5條所規定的許可的專利 和/或專有技術、設計、技術培訓和技術文件費用的百分之_______（______ %），即____________（大寫：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿），支付給賣方。 
A．注明運費已付的空運提單正本一份，副本三份，或交郵的詳細設計 圖航郵挂號收據； 
B．簽發的商業發票一式五份；（發票注明支付金額，許可的專利和/或專 有技術費用部分）； 
C．即期匯票一式二份。
4.2.3 合同設備價款的支付: 
買方在收到賣方提交的下列單據經審核無誤後_________ 天內，根據每批裝船按比例，將本合同3.2.1條所規定的合同設備的價款的百分之 _______ （_______%），即 _________________（大寫：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿），支付給 賣方。 
A. 全套清潔、已裝船、空白�螃Y、空白背書、通知並注明運費已付的海運 提單正、副本各三份； 
B．全套海運保單或保險憑證正、副本各一式二份，按合同設備的發票金額 110%投保一切險、戰爭險和艙面險（如需注明可按合同貨幣在中國索賠)。 
C. 簽發的商業發票一式五份；（發票注明支付金額和價格清單）； 
D．詳細的裝箱單正本一份，副本五份，注明裝箱重量、號碼和相應的發票 日期； 
E．由生産廠家簽發的質量合格證正本一份、副本五份； 
F．即期匯票一式二份。 
G．生産廠家所在國的有關機構或機關簽發的産地證書正本一份、副本五 份； 
H. 表明承運船隻已經買方同意的買方傳真一份； 
I．裝船後賣方立即通知買方的傳真一份。 
4.2.4 合同專案驗收後的支付: 
買方在收到賣方提交的下列單據經審核無誤後_________ 天內,將本合同第3.2.1，3.2.2，3.2.3和3.2.5條所規定價款的百分之__________（____________%）， 即 _______________（大寫:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿），支付給賣方。 
A．買賣雙方現場代表簽署的合同專案驗收證書一份； 
B．簽發的商業發票一式五份，發票注明支付金額，許可的專利和/或專有 技術費用部分； 
C．即期匯票一式二份。 
4.2.5 合同專案保證期後的支付 
買方在收到賣方提交的下列單據經審核無誤後 _______ 天內，將本合同第3．2．1，3．2．2，3．2．3和3．2．5條所規定價款的百分之_____（ %），即________（大寫：＿＿＿＿＿＿＿），支付給賣方。 
A．買方簽發的、證明合同專案的保證期到期的證書一份； 
B．簽發的商業發票一式五份，發票注明支付金額，許可的專利和/或專有技術費用部分； 
C．即期匯票一式二份。 
4.2.6 技術服務費用的支付: 
在賣方第一批技術人員到達工作現場後的每 ___________ 月，且收到賣方提交的下列單據經審核無誤後___________天內，買方將本合同第3．2．4條所 規定技術服務費用支付給賣方。 
A．簽發的商業發票一式五份，發票注明支付金額和許可的專利和/或專有 技術費用部分； 
B．買賣雙方現場代表聯合簽署的時間表二份； 
C．即期匯票二份。 
4.3 如果賣方不能按期提交第4.2.3條規定的單據，因此在卸貨港所發生的一 切費用（包括但不限於保管費和過期罰款）均由賣方承擔。 
4.4 如果合同規定的預提稅、預定的違約金和/或損害賠償金應由賣方支付， 買方有權從應支付給賣方的款項中扣除。 
4.5 所有在買方銀行發生的費用由買方承擔，而發生在買方銀行以外的費用 均由賣方承擔。 

第五章 交貨和保險 
5.1 賣方應于本合同生效日後______個月內分_______批將本合同專案的設 備交付完畢。 
5.2 本合同設備的總毛重大約爲_____噸，淨重爲_____噸，總體積大約爲 ________立方米。 
5.3 本合同專案設備的交貨港爲_________ ；卸貨港爲____________. 
5.4 賣方應根據本合同附件六所規定的時間表，在合同生效後____月內向買 方提交初步交貨計劃表一式六份。初步交貨計劃表包括合同號、項號、設備名稱、 型號、規格、數量、單價、總價、大約總毛重、大約總體積、預計交貨時間、交 貨港口、危險品和/或易燃品的品名及其國際危規號等，並提出超大和/或超重 設備尺碼（長、寬、高和體積）和大約重量，以及危險品、易燃品在運輸保管方 面的特殊要求和注意事項。 
5.5 不能拆卸的單體設備重量最大限度爲20公噸，體積最大限度爲長、寬、 高分別爲12、2.7、3米（12X2.7X3），凡超過此限度的設備賣方應在本合同生效之日後________個月內向買方提供草圖	一式六份，經買方同意後，才能安排制 造。買方應于收到上述草圖後______ 天內以書面方式予以確認，否則賣方即開始製造。爲了方便陸路運輸，重量超過40噸的設備製造須提前經賣方確認。 
5.6 在本合同生效之日起個 ____月內，賣方應向買方提交最終交貨計劃一式六份，包括合同號、項號、設備名稱、型號、規格、數量、危險品的品名以及 國際危規號、每件設備的大約毛重、淨重、單價、總價、每件設備的大約尺碼、體 積、交貨港、預計的裝船如期和超大和/或超重設備的外形包裝草圖。 
5.7 合同設備中如含有危險和/或易燃專案，賣方應提交英文說明書一式六 份，說明名稱、特點以及該設備事故處理和防範措施。同時，賣方應指導船公司 在提單上標明該設備的箱號/集裝箱。 
5.8 合同設備保管如有特殊要求，賣方應提供英文說明書一式六份，說明在 陸地運輸和保管中的特別防範措施。 
5.9 合同設備的裝船應盡可能地單機成套，安裝用的專用工具、材料、易損 件應隨主機一同交付，如果有通常裝在甲板上的設備和材料，賣方應負責進行適 當的包裝及採取特殊的保護措施。 
5.10 在每批設備備妥待運前不遲於________ 天，賣方應以傳真通知買方如下內容： 
A．合同號； 
B．合同備妥待運日； 
C．貨物總體積； 
D．貨物總毛重/總包裝件數； 
E．裝船港口名稱； 
F．重量超過20噸，或尺寸超過12米 x 2.7米 x 3米的每件設備的名稱、總的毛重和總體積； 
G．危險品和/或易燃品的名稱、重量和國際危險號； 
同時賣方還應航寄給買方下列文件，每件一式六份： 
A. 發運貨物的詳細清單，包括合同號、序號、設備和材料的名稱、規格、 型號、數量、單價、總價、單重、單體體積和總體積、每件貨物的外形尺寸(長X 寬X高)、總件數和裝船港口名稱； 
B. 重量超過20公噸或體積超過12X2.7X3米的每件大件貨物的外形包裝草 圖； 
C．易燃品和危險品的名稱、性質、特殊防護措施及事故處理方法說明書；
D．合同設備在運輸和儲藏過程中的特殊防護措施說明書。 
上述文件另航寄買方指定的運輸代理二份，作爲買方安排運輸和裝卸工作的 依據。 
5.11 賣方負責預訂船位，可從下列名冊中選定船公司： 
如果上述所列的船公司不能滿足合同項下的運輸要求，賣方應向有良好信譽 的船公司租船位，所租船舶不得超過15年船齡，有良好的運輸記錄，並且所挂旗 幟或船舶國籍屬於雙方當事人所在國政府接受的。如果該船舶服務年齡超過了15 年，應由賣方支付費用對此予以保險。 
每次裝船前不遲於___________ 天，賣方應將所建議的船名、船	齡、船舶國籍、登記地、船主、航線、所租船舶的路程、預計離港日期、預計到港日期等 事項通知買方批准。如果買方在收到上述通知後__________ 天內沒有書面意見或沒有反對，則視爲買方同意該建議的船舶。 
5.12 非經買方同意，買方不接受“甲板上裝運”或“轉運”。 
5.13 爲了方便接收和陸地運輸，賣方應在每批設備裝船後________小時內， 以傳真通知買方下列事項：合同號、合同設備名稱、實際	裝貨數量、總的毛 重、總的體積、船名、裝船完成日期或開航日	期、預計到達卸貨港日期。如果賣 方實際裝船的合同設備件數與賣方前期的通知有差異，該差異應分別說明。 
裝船後______天內，賣方應分別向買方和收貨人航寄提單、簽發的商業發票、 廠家的質量證書、産地證書、保單或保險憑據和裝箱單等	單據各一式一份。 
5.14 第三方的海運提單是不被接受的。 
5.15 如果賣方不能按照最終的交貨時間表交貨，賣方應按照下列比例支付其 遲延交貨的違約金： 
A．第一至第四周，每周的違約金爲遲延交付設備價值的百分之________。 
B．第五至第八周，每周的違約金爲遲延交付設備價值的百分之________。 
C．第九周後，每周的違約金爲遲延交付設備價值的百分之____.	在計算 違約金時，如不足一周，按一周計。違約金的總量不得超過合同總價的百分之 _______ 。違約金的支付不能免除賣方繼續履行交付設備的義務。 
5.16 賣方應向信譽卓著的保險公司以買方爲受益人按合同設備發票金額的 110%投保一切險、戰爭險和甲板險（如有甲板裝運）。按合同金額投保，並表明 可在中國索賠，且不得含有免賠條款。 
如果合同設備在運輸過程中丟失和/或損壞，賣方應協助買方向保險公司申請賠償或爲買方利益向保險公司提出索賠，如買方要求，賣方應以原合同價格按 原樣向買方增補。 

第六章 包裝與標記 
6.1 除非合同另有規定，包裝應由賣方負責。賣方交付的所有設備應具有適 合遠洋和陸地運輸和多次搬運、裝卸、新的、堅固的木箱包裝，賣方應根據設備 的特點和需要採取防潮、防雨、防銹、防震、防腐蝕和防其他損害等必要的保護 措施，以保證合同設備安全無損地運抵工作現場。 
6.2 賣方對包裝箱內和捆內的各散裝部件均應系加標簽，注明合同號、主機 名稱、本部件名稱以及部件在散裝圖中的位元號、零件號。備件和工具除注明上述 內容外，還需注明“備件”或“工具”字樣。 
6.3 賣方應在每件包裝箱的鄰接四個側面上，用不褪色的油漆以明顯易見的 英文字樣印刷以下標記： 
A．合同號； 
B．嘜頭標記； 
C．目的港； 
D．收貨人； 
E．合同設備名稱及項號； 
F．箱號/件號； 
G．毛重/淨重； 
H．尺碼（長x寬x高，以毫米表示）。 
6.4 凡重量爲2噸或超過2噸的合同設備，應在包裝箱的四個側面以英文及 國際貿易運輸常用的標記、圖案標明重量及挂繩和重心位置，以便裝卸搬運。根 據設備的特點和裝卸、運輸上的不同要求,在包裝箱上應以英文明顯地印刷“輕 放”、“勿倒置”、“防雨”等字樣以及相同的國際貿易通用的標記圖案。 
6.5 每件包裝箱內，應附有下列文件： 
A．詳細的裝箱單一式二份； 
B．質量證書一式二份； 
C．與合同設備相關的技術文件一份； 
D．需組裝的機器與部件的詳細裝配圖一式二份。 
6.6 如果是集裝箱運輸，賣方要仔細檢查集裝箱以使處於良好狀態的集裝箱來運輸該合同設備。集裝箱內要有足夠的填充物或楔子以防合同設備在集裝箱內 搖晃。賣方應對其疏忽而造成的合同設備損壞承擔責任。 
6.7 如果合同設備的損壞或丟失是由於不正確的包裝和/或不適當的保護措 施所致，賣方應根據合同的規定負責修理、替換和/或賠償。如果合同設備出現 錯運是因爲錯誤或模糊包裝和/或裝船標誌所致，賣方應承擔因此而多支出的費 用。 
6.8 賣方使用的木制包裝物應能防蟲害侵襲，如果在檢疫檢驗中發現蟲害，賣 方應承擔在卸貨港對包裝予以煙熏消毒或替換而發生的一切費用。 

第七章 技術文件 
7.1 本合附件二、三、八和附件九 規定了技術文件的內容。除非另有規定，技術文件應採用公制，說明和解釋採用英文。 
7.2 賣方提供的技術文件，應具有適合長途運輸、多次搬運、防潮和防雨的 包裝，每包見所未見的封面上應注明下列內容： 
A．合同號； 
B．收貨人； 
C．目的地； 
D．嘜頭標記； 
E．毛重（公斤）； 
F．箱號/件號。 
每包技術文件應附有技術文件的詳細清單一式二份，標明技術文件的序號、 代號、名稱和頁數。 
7.3 在本合同生效之日起__________ 月內，賣方應分批以“DDU目的地機場”價格條件交付技術文件。 
7.4 在交付技術文件後__________小時內，賣方應用傳真通知買方交付日期、 件數、航班號和大約毛重，並向買方提交下列文件： 
A．空運提單二份（注明合同號和收貨人）； 
B．技術文件的詳細清單二份。 
如果技術文件發生短缺、丟失和損壞，賣方應在收到買方的通知後立即免費 對短缺、丟失和損壞部分予以更換。 
7.5 目的地機場在空運提單上所加注的日期應視爲技術文件實際的交付日期。
7.6 賣方應根據本合同附件和所規定的時間表交付技術文件。如果賣方沒有 按期按批交付技術文件，賣方應按下列比例承擔延期交付違約金： 
A．第一周，每周按技術文件價值的百分之 ___________； 
B．從第二周至第四周，每周按技術文件價值的百分之 __________ ; 
C．第五周起，每周按技術文件價值的百分之__________ 。 
不足一周按一周計算違約金。不管涉及到哪一部分技術文件延期交付，應將 本合同第3．2．2和第3．2．3條所規定的技術文件的總價（包括許可費和設計 費）作爲計算違約金的基礎。賣方延期交付技術文件的違約金的總量不得超過本 合同價的百分之_____，賣方支付違約金不能免除其繼續交付技術文件的義務。 

第八章 設計和設計聯絡 
8.1 爲使本合同專案建設工作的順利進行，雙方應按本合同附件八 和本章的規定實施設計和設計聯絡。 
8.2 買賣雙方任何一方所承擔的設計範圍和所提供的技術文件詳見本合同附 件八，買方提交的技術文件應作爲初步設計。 
8.3 設計聯絡會議內容、時間、地點、費用、參加人員的人數和資格等，詳 見附件八。 
8.4 自本合同生效之日起______ 個月內，賣方應自費派遣技術人員參加“協商會”並在會議前向買方提交相關的技術文件，包括本合同附件九所規定的標準 和規範。賣方有權對該標準和規範提出意見。在“協商會”上經雙方討論商定的 標準和規範作爲初步設計。 
 “協商會”期間，雙方應簽署協商會議紀要，以此作爲初步設計。 
8.5 自本合同生效之日起 ______個月內，買方應根據附件八的規定派遣技術人員到賣方所在地參見初步設計聯絡會議，賣方應根據附件的八規定在會議前 向買方提交初步設計文件。買方有權對前述文件提出意見，賣方對此應予充分考 慮並因此修改該設計。初步設計經協商後，雙方應簽署協議書。該協議書即作爲 最終設計的依據。 
8.6 自本合同生效之日起 ______個月內，買方將派遣技術人員到賣方所在地參加最終設計協商會議，在此期間，雙方應簽署協商會議紀要。 
8.7 在設計聯絡會議期間，賣方應協助買方技術人員到生産合同設備的製造 廠參觀並回答買方提出的與合同專案技術事項有關的一切問題。

第九章 標準與檢驗 
9.1 賣方對本合同設備的設計、選材、生産和檢驗等，應根據雙方在設計聯 絡期間簽署協定的規定以及賣方和/或買方國家現行標準規範進行，詳見本合同 附件九。 
9.2 賣方或生産廠家應對合同設備進行檢驗並向買方提交廠家的質量合格證 書和發貨前的檢驗記錄，因此所發生的費用均由賣方承擔。 
9.3 買方有權派遣檢驗人員到賣方和/或生産廠家國家同賣方檢驗人員一起 對主要設備的生産程式和質量進行檢驗。賣方應免費向買方的檢驗人員提供工作 設備，包括但不限於必要的技術文件、檢驗工具和儀器。 
賣方應提前_______月將檢驗日期通知買方，買方應在收到該通知後_____ 日內確認是否派遣技術人員。 
9.4 主要設備的裝配和檢驗應有買方檢驗人員在場，買方檢驗人員有權參加 與合同設備有關的會議。 
9.5 賣方應充分考慮買方檢驗人員提出的意見，並自費採取必要措施排除缺 陷或不符合本合同規定之處，當缺陷排除後，應再次核對總和實驗，由此引起的費 用均由賣方負擔。 
如果買方的技術人員不能按期到場並不屬於賣方的過錯，賣方有權自行安裝 和檢驗。 
9.6 裝船前的檢驗並不能替代卸貨港和/或工作現場的檢驗，也不能免除賣 方基於本合同的擔保義務。 
9.7 對合同設備的開箱檢驗應由工作現場的檢驗機構履行。買方應在開箱檢 驗前__________天將檢驗的日期通知賣方，賣方可自費派代表參加。如果賣方代 表不參加開箱檢驗，該檢驗機構有權缺席檢驗。 
在開箱檢驗中如發現設備有短少、缺陷、損壞或其他與合同規定不符的，檢 驗機構出具的檢驗證書即作爲買方向賣方索賠的有效證據。 
9.8 如是集裝箱運輸，集裝箱的開�ㄘM返還不屬於開箱檢驗。 
9.9 如合同設備在保證期間發現缺陷，無論什�洎鴞]，包括但不限於潛在的 缺陷或使用不適當的材料等，買方都有權申請檢驗機構予以檢驗，並根據檢驗證 書向賣方提出索賠。 
9.10 如果發現技術文件所規定的標準和規範不完整，檢驗機構可自主根據買方國家現行標準和/或其認爲其他適當標準進行檢驗。 

第十章 安裝、試車、投料試生産、性能測試和驗收 
10.1 安裝、試車、投料試生産、性能測試和驗收均由買方在賣方的技術指導 下進行，技術服務的範圍詳見本合同附件四。 
10.2 安裝開始前_______天，雙方各自任命一名工地代表。雙方將根據本合 同附件十的規定實施本合同專案的安裝、試車、投料試生産、性能測試和驗收，詳 細情況將記錄於工作日志中並由雙方的工地代表簽署。 
10.3 安裝應在本合同生效日起___________ 月內實施和完成。當安裝符合技術文件的要求時，雙方應於完成之日起五日內簽署設備安裝證書，上述證書的 簽字日即被認爲是安裝完成之日。 
10.4 試車應在本合同生效日起___________ 月內實施和完成。如試車順利實施並符合技術文件的要求時，雙方的工地代表應在試車完成之日五天內簽署試 車證書。 
10.5 投料試生産和性能測試不得超過__________次並在試車完成之日起 _________月內完成。投料試生産和性能測試的詳細程式由賣方在完成試車前提 出，最後由雙方協商一致。 
投料試生産和性能測試，買方應根據本合同附件十的規定，準備足夠的維修 工具、實驗室及檢驗設施和熟練技術人員，並準備好所規定數量和質量的全部原 料，有關的公用工程。賣方應準備好本合同附件十所列的熟練技術人員、足夠的 配件和其他專案。 

買方的採樣和化驗將在雙方工地代表在場的情況下進行。	如果合同專案 在投料試生産上不能符合本合同附件十所規定的要求，雙方應對此予以調查，責 任方應採取適當措施消除缺陷。 
10.6 如果合同專案在投料試生産中達到良好穩定運行，雙方應確定性能測試 的開始日期，性能測試的期間爲__________ 天。性能測試的進行應根據本合同附件十，詳細情況將記錄於工作日志中並由雙方的工地代表在性能測試完成後五 天內簽署。 
如果在性能測試中所有專案實現了附件__________ 所規定的保證數值，雙方工地代表應在五天內簽署合同專案驗收證書一式四份，雙方各執二份。 
10.7 如果在性能測試中任何一項不能達到本合同附件__________ 所規定的性能或保證數值，雙方應會同研究失敗的原因，並按以下規定處理： 
10.7.1 如果由於賣方原因未能達到性能或保證數值時，賣方應在雙方協商的 期限內採取措施消除缺陷，所有涉及的費用，包括但不限於工作小時費用、設備 和原材料費用、交貨到工作現場和/或離開工作現場的運輸和保險費用以及賣方 技術人員的技術服務費用等，均由賣方負責。 
在上述缺陷消除後，應按照本合同附件十的規定儘快進行第二次性能測試。 但賣方進行性能測試的次數只限於三次。如果 由於賣方原因在第三次性能測試中未能達到性能或保證數值時，買方有權根據本合同附件十的規定向賣方索賠違 約金，只有在上一次性能測試結果表明合同專案已經達到本合同附件十規定的技 術性能和保證數值的情況下，違約金規定才不適用。 
在收到賣方賠償的違約金後，買方應簽署合同專案驗收證書正本一式一份、 副本一式一份。無論如何，賣方應確保合同專案達到本合同附件三規定的性能和 保證數值，違約金的賠償並不能免除賣方保證期的義務。 
10.7.2 如果性能測試的失敗屬於買方的責任，賣方應協助買方再安排一次測 試，因此所發生的一切費用由買方負責。 
如果因爲買方原因性能和保證數值在第二次測試中仍不能達到要求，合同項 目應視爲買方接收，測試完成後五天內雙方的工地代表共同簽署一份驗收證書， 但賣方應協助買方採取必要措施使合同專案達到性能和保證數值，包括增加的技 術服務費用在內的所有費用均由買方承擔。 
10.8 如果因爲賣方的其他原因導致試車和/或投料試生産和/或性能測試等 延期，和/或導致增加額外費用，買方有權對因此所造成的損失提出索賠。 
如果屬於買方原因，在最後一次交貨提單簽發日後_____月內仍然沒有進行 性能測試，合同專案視爲買方已經驗收，但賣方仍應承擔在本合同附件四規定的 技術服務範圍和金額內協助買方開動和運轉合同專案的責任。 
10.9 合同專案的驗收並不能免除賣方對合同專案的保證責任。 

第十一章 保證與擔保 
11.1 賣方保證本合同專案能安全、穩定運行並能夠生産出符合本合同附件三 規定的合格合同産品。 
11.2 賣方保證自己是該許可專有技術和/或專利的合法的所有人和/或擁有 者，而且保證自己有權許可該項技術給買方。
買方在許可地域內被第三方指控對上述專有技術和/或專和/其他知識産權 構成非法利用或侵權，買方應通知賣方，賣方應在買方協助下，以買方名義與第 三方進行交涉並賠償買方因此而受到的一切費用和損害等經濟損失。 
11.3 賣方保證其提供的專有技術和/或專利符合本合同附件二規定的先進性、 工業化和可開發性。 
11.4 賣方保證其提供的合同設備是全新的，工藝是先進的，質量是優良的， 設計無任何缺陷，原材料和工藝均能穩定運行和滿足本合同的目的，並符合本合 同附件三的規定。 
賣方保證合同設備的使用和/或合同産品在許可地域的生産	與銷售不會引 起第三方的侵權指控，如果買方因使用合同設備和/或生産與銷售合同産品在許 可地域內遭到第三方的非法利用或侵犯其專有技術和/或專利和/或其他知識産 權的指控，買方應通知賣方，賣方應在買方協助下，以買方名義與第三方進行交 涉，並賠償買方因此而受到的一切費用和損害等經濟損失。 
11.5 賣方保證所交付的技術文件完整、清晰、準確，並能滿足合同專案的設 計、檢驗、安裝、試車、投料試生産、性能測試、運行和維修的要求。 
11.6 賣方保證按期派遣熟練的技術人員向買方提供專業的、正確的和足夠的 技術服務和技術培訓。 
11.7 合同專案的保證期爲合同專案驗收通過之日起的_______個月。合同項 目的擔保具體規定在本合同附件三。在保證期內，如發現屬於賣方責任的缺陷，賣 方接到買方的通知後立即予以修理以替換該缺陷設備。修理的或替換的設備保證 期應從買方驗收後重新起算。 
保證期內，如合同專案因賣方原因必須停止運行，該保證期應相應延長。保 證期滿時，買方應簽署合同設備保證期滿證書正本、副本各一份。 

第十二章 改進與回授 
12.1 本合同有效期內，如賣方對所許可的專利和/或專有技術有所改進，賣 方應免費許可買方使用這種改進。如有必要，賣方還應提供技術支援以使該技術 改進能順利投入本合同專案的使用。技術支援所發生的一切費用均由買方根據本 合同附件四所規定的條件負擔。 
12.2 買方有權在合同專案的運作過程中對許可的專利和/或專有技術予以改進，買方應將其所進行的改進通知賣方並免費回授給賣方，但買方所作的任何技 術改進屬於買方獨佔。 
12.3 任何一方有義務對對方提供的技術改進保密，並承諾不將此許可	任何第三方。 

第十三章 保 密 
13.1 本合同生效後_______年內，任何一方有義務採取適當措施不向任何第 三方透露上述專有技術和相關的技術文件，對參與履行本合同的其他方除外，但 他們必須承擔同樣的保密義務。 
13.2 任何一方應對其和/或其技術人員在履行本合同過程中獲得的或接觸到 的商業秘密承擔保密義務，未經對方事先的書面同意，不得利用或公開該商業秘 密。 
13.3 保密義務不適用於下列技術資料： 
A．現在或隨後已進入公共領域的； 
B．可以證明在公開該技術秘密時，該技術秘密已被任何一方所擁有，而且 並非直接或間接地從對方得到； 
C．從第三方已合法獲得的並不承擔保密義務的資料。 

第十四章 索 賠 
14.1 如果賣方在設計、生産、檢驗、安裝、試車、投料試生産、性能測試和 保證期等過程中，未能履行本合同規定的任何義務，買方有權採取下列補救措施 向賣方提出索賠： 
14.1.1 賣方負擔費用修理有缺陷的合同設備或消除合同設備的缺陷或與合同 規定不符之處，如果賣方不能派遣技術人員到工作現場，買方有權自行消除該缺 陷或與合同規定不符之處，費用由賣方負擔。 
14.1.2 賣方負擔費用重新替換缺陷的合同設備或錯誤的技術文件或補充缺漏 的合同設備或技術文件，賣方保證替換品的質量並重新計算保證期。上述替換品 或補充品由賣方自擔費用和風險運送到工作現場，緊急需要的設備應空運到工作 現場。 
14.1.3 根據劣質程度、損害範圍和買方實際遭受損失的數額，降低合同設備的價格。 
14.1.4 賠償因賣方過錯而造成的其他損失和損害。 
14.2 在保證期滿後30日內，買方出具的在保證期內發現的設備缺陷的索賠 通知仍然有效。 
14.3 如果賣方在接到買方的索賠通知後14日內未予以答復，該索賠被視爲 賣方已經接受。 

第十五章 解除合同 
15.1 對於賣方的下列違約，買方向賣方發出書面違約通知後提前全部或部分 解除合同，但並不損害買方可採取其他補救措施的權利： 
A．在規定的交付合同設備和/或技術文件時間之後________天內仍未交 付； 
B．未能使合同專案達到本合同附件十規定的性能和保證數值的最低水平； 
C．未能履行合同規定的其他義務，但微小的缺陷除外，在收到買方的違約 通知後__________天內仍未彌補其過失。 
15.2 如果一方破産或無力償還債務，另一方可隨時向其發出書面通知解除本 合同，解除合同並不損害或影響任何其他可能的補救措施。 
15.3 如果買方全部或部分解除本合同的，買方可依據適當的條件從別處取得 與賣方未交付和/或未履行相類似的設備、技術文件和/或技術服務，賣方承擔 因此而多支出的費用。無論如何，賣方應繼續履行合同中未解除的部分。 

第十六章 不可抗力 
16.1 任何一方由於戰爭及嚴重的火災、颱風、地震、水災和其他不能預見、 不可避免和不能克服的事件而影響其履行合同所規定的義務的，受事故影響的一 方將發生的不可抗力事故的情況以傳真通知另一方，並在事故發生後十四天內以 特快專遞將有權證明的機構出具的證明文件提交另一方證實。 
16.2 受影響的一方對因不可抗力而不能履行或延遲履行合同義務不承擔責任。 然而，受影響的一方應在不可抗力事故結束或消除後儘快以傳真通知另一方。 
16.3 雙方在不可抗力事故停止後或影響消除後立即繼續履行合同義務，合同 條件相應延伸，如果不可抗力事故持續一百二十天以上時，任何一方有權書面通知對方終止本合同。 

第十七章 稅 費 
17.1 中國政府依據其現行的中華人民共和國稅法對買方課征與本合同有關或 因執行本合同所發生的各項稅費，均由買方支付。 
17.2 中國政府根據其中國稅法和與賣方國家政府關於避免雙重徵稅和防止偷 逃所得稅的協定而向賣方課征的各項稅費均由賣方支付。 
買方依據中國稅法有義務對根據本合同而應得的收入按比例代扣一定的稅費 並代向中國相關的稅務機關繳納，在收到稅務機關出具的關於上述稅款稅收單據 後，買方應毫不遲延地轉交給賣方。 
17.3 中華人民共和國以外所發生的與本合同有關和履行本合同的各項稅費均 由賣方承擔。 

第十八章 仲 裁 
18.1 凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，均應提交中國國際經濟 貿易仲裁委員會深圳分會，按照申請仲裁時該會現行有效的仲裁規則進行仲裁， 仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。仲裁適用中華人民共和國法律。 
18.2 除非另有規定，仲裁不得影響合同雙方繼續履行合同所規定的義務。 

第十九章 合同的生效及其它 
19.1 本合同在雙方授權代表簽字後，如果需要，由各方分別向本國政府當局 申請批准。雙方應盡一切努力使合同在簽字後30天內獲得各自國家當局的批准， 各方應立即將批准日期書面通知對方。最後一方的批准日期爲本合同生效日期。 
19.2 本合同有效期爲________ 年。本合同期滿時，合同項下的任何未了的債權債務不受合同期滿的影響，債務人應對債權人繼續償付未了債務。 
19.3 本合同用中英文兩種文字寫成，兩種文字具有同等效力。本合同正本一 式四份，買賣雙方各二份。 
19.4 本合同的附件爲本合同不可分割的組成部分，與合同正文具有同等法律 效力。如附件與正文有衝突之處,正文內容優先。
19.5 對本合同條款的任何修改、增減和變更，須經雙方授權代表以書面形式 做成和簽字。 
19.6 除非合同另有規定，本合同條款的解釋適用於國際商會《2000年國際 貿易術語解釋通則》和國際商會《跟單信用證統一慣例》（UCP500）。 
19.7 任何一方未經另一方書面同意，不得將本合同項下的任何權利或義務轉 讓給第三者。 
19.8 雙方之間的聯繫應以書面形式進行，涉及重要事項的傳真應隨後立即以 航空挂號信件或特快專遞確認。 

    買方：___________________________________＿＿＿ 
賣方：___________________________________ 
地址：___________________________________ 
郵編：___________________________________ 
電話：___________________________________ 
傳真：___________________________________ 
電子信箱：_______________________________ 
授權代表簽字：___________________________ 
簽字日期：_______________________________ 

賣方：___________________________________ 
地址：___________________________________ 
郵編：___________________________________ 
電話：___________________________________ 
傳真：___________________________________ 
電子信箱：_______________________________ 
授權代表簽字：___________________________ 
簽字日期：_______________________________

附件四：技術服務的範圍和賣方技術人員的待遇 

1. 爲了合同專案的順利建設，賣方應派遣技術熟練的、身體健康的、稱職的 技術人員到工作現場提供技術服務。如有必要，雙方可根據合同專案的進展情況 通過協商調整本附件所規定的任何事項。 
2. 賣方應在技術人員到達工作現場兩個月前就將有關情況通報買方包括所派 技術人員的姓名、性別、出生日期、籍貫、護照號碼、專業、資格、職業、工作 地點和外語能力，以取得買方的協助與確認。出發前七天，賣方應向買方通報所 派技術人員的姓名、具體的出發日期、航班號、到達日期、行李件數和重量。 
3.賣方應從所派遣的技術人員中指定一名作爲其工地代表，以解決與合同項 目有關的技術問題。 
4.買方技術人員到達工作現場後，雙方的工地代表應對一份總的進度表和月 度的工作計劃進行協商並達成一致。對工作進度的修改必須經雙方工地代表協商 解決。賣方技術人員應根據雙方同意的工作進度開展工作。 
5.在合同專案的安裝、試車、投料試生産、性能測試、運行和維修期間，賣 方技術人員應詳細解釋技術文件，對買方提出的技術問題應給予必要示範操作和 全面回答。 
6.賣方技術人員每周工作四十小時（每周五天，每天八小時。每天的上下班 時間按工作現場的規章制度。中華人民共和國的所有星期六、日和公共假日均爲 賣方技術人員的無薪假日。 
如果需要加班，雙方工地代表應事先協商達成一致，正常工作日八小時以外 的工作時間或星期六、日及公共假日的工作時間等均視爲加班。但賣方技術人員 在合同專案投料試生産、性能測試期間的每周四十個小時內的倒班不算加班。 
加班後，應儘量在短期內安排倒休。如不能安排倒休，加班一小時按一個半 小時計算，連續加班超過六小時的技術人員，應允許休假一天。 
7.賣方技術人員的實際工作小時和加班時間應按日記載在“計時卡”一式二 份，由雙方工地代表簽字，“計時卡”作爲計算技術服務費和賣方技術人員加班費 的依據。買方將按下列	比例支付賣方技術人員每天的技術服務費： 

工地代表：美元 ____________________ 每人/每天； 
總工程師：美元 ____________________ 每人/每天；
工程師：美元 ____________________ 每人/每天； 
技術人員：美元 ____________________ 每人/每天。 
8.賣方技術人員缺勤，買方不支付其缺勤期間的技術服務費用。對由於賣方 的責任而增加“計時卡”上的工作時間，買方不予簽署。 
9. 技術服務費將根據雙方工地代表簽署的“計時卡”每___月結算一次。 
10. 工作進度、每天完成的主要工作、發生的問題或責任事故以及解決的辦 法等，都應以中、英文記載在工作日志中，每天由雙方工地代表簽字一式兩份，雙 方各執一份。 
11.買方應對賣方技術人員出入中國國境和在中國居留提供便利，所有費用 由賣方承擔。 
12.根據中國海關的規定，買方協助賣方技術人員辦理適量的生活用品和提 供技術服務必須的技術文件、工具和儀器的入、出中國國境的手續，費用由賣方 負擔.上述物品在運進或運出前，賣方須將品名、規格、數量、重量、航空單號、 金額和進出日期等預先通知買方。 
13. 買方爲賣方技術人員安排膳食、帶有必要家俱和衛生設備的住房、辦公 室、安全用品、必要的工作用具、交通工具、工作現場翻譯等，費用由賣方負擔。 
14. 其 它: 
14.1 如果認爲賣方的技術人員不夠稱職，買方有權要求賣方予以更換，更換 所發生的一切費用由賣方負擔。 
14.2 在不影響現場工作的前提下，經買方同意，賣方可以自費更換其技術人 員，即使是交接工作的兩位技術人員都在現場，買方只負擔一人的技術服務費用。 
14.3 賣方技術人員在中國居留期間，應遵守中華人民共和國的法律和法規以 及工作現場的規章制度。 

附件五：技術培訓和買方技術人員的待遇 

1．賣方同意接受買方技術人員 _________名到賣方工廠進行培訓共______ 天，包括往返路程。 
2．技術培訓期間，賣方應選派技術熟練的、稱職的技術人員對買方技術人員 進行技術指導並解釋買方技術人員在執行合同中可能遇到的一切技術問題。 
3．賣方應于培訓前三個月向買方提出初步培訓計劃供買方確認，買方應于培 訓前一個月通知賣方受培訓人員的姓名、性別、出生日期、籍貫、職務和專業。最 終培訓計劃應由雙方根據買方技術人員的實際需要通過協商決定。 
4．賣方應保證買方技術人員在上述專案各個不同崗位進行培訓，以使他們懂 得和掌握合同專案的工藝、操作、檢驗、修理和維修。培訓開始前，賣方應向受 培訓人員詳細解釋操作規則和工作注意事項。 
5．賣方應免費向買方技術人員提供培訓期間的試驗儀器、工具、技術文件、 圖紙、參考資料、工作服、防護用具、其他必需品和合適的辦公室。 
6．賣方應向買方技術人員提供住房、膳食和交通便利，費用由買方負擔。 
7．賣方應協助買方技術人員辦理出入賣方國家的簽證和居留期間的一切手 續。

附件十一: 賣方銀行對預付款的不可撤銷的保證函 

（格 式） 

受益人: _________________________ 
買方名稱:_________________________ 
地 址:_________________________ 
郵 編：_________________________ 
本保證函號碼：_________________________ 

    關於貴公司與 _________________________（以下簡稱賣方）于________________________ 年＿＿＿＿月_________ 日簽訂的向貴公司售與________________（項或工程名稱）、合同總 價爲______________________（大寫：________________________________________________ ）的第__________號合同（以下簡稱合同），應賣方要求，我們願開立以貴公司爲受益人的本保證函， 保證責任範圍爲金額__________ （大寫：____________）加利息，並承擔責任如下： 
如果貴公司書面通知我們賣方未能交付合同項下設備和/或技術文件的全部 或部分時，我們在收到第一次書面通知的次日起五個工作日，不管賣方是否有異 議，無條件地將貴公司已支付給賣方的預付款計_________________________ （大寫：___________________________________ ），並加計自貴公司支付之日起到我們實際退款之日止的利息，利息按年利率 _______計算，一併退還給貴公司。 
本保證函的保證責任將根據每次賣方實際交付、貴公司收到的發票金額而逐 次按比例遞減。 
本保證函自開出之日起生效，有效期到最後一次裝船的提單日期後的六十天。 本保證函一經到期，不管是否退還我們，將自動失效和無效。 

開出保證函銀行名稱___________________
簽字，印鑒___________________ 

附件十二 買方銀行不可撤銷的保證函（格式） 

日 期: _________________________ 
受益人： _________________________ 
賣方名稱:_______________________ 
地 址：_________________________ 
郵 編：_________________________ 
本保證函號碼：____________________ 

關於貴公司（以下簡稱賣方）與 __________________（以下簡稱買方）于__________年 _______月 _______日簽訂的向貴公司購買__________（工程或專案名稱）、合同總價爲_____________（大寫：＿＿＿＿_＿)的, 第 _____號合同（以下簡稱合同），應買方要求，我們願開立以貴公司爲受益人的第_____ 號不可撤銷的保證函，保證責任範圍爲金額爲____________（大寫：＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿），即合同總價的_____%，我們保證買方將按合同的條件付款，並承擔責 任如下： 
如果貴公司履行了所規定的合同義務，按合同第______________________、 _____________、___________章規定提交的單據經買方審核無誤，而買方仍未能 按合同第_________、_________ 、_________ 、________ 章規定履行支付責任的全部或部分時，我們在收到貴公司書面通知、發票和其他涉及未付的賠償款 證明文件之日起七個工作日內，將有關的款項加年利率_______ 的利息一併支付給貴公司，但買方能證明所提交的文件不符合合同規定的除外。 
如果買方證實賣方應依照合同的規定向買方支付的違約金和賠償金，買方有 權從上述任何一次支付中扣除。 
本保證函自開出之日起生效，有效期到________________. 
本保證函的保證責任將根據買方和我們的支付而自動遞減。 
本保證函一經到期，應退還我們。 

                                     開出保證函銀行名稱 ___________________ 
                                     簽字，印鑒 ___________________________